문서번호	시설보수과-7225
결재일자	2016.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김석수		윤승범	12/13 代한병연
협 조

『중랑물재생센터 수질측정기 유지보수 용역』 설계변경(정산) 검토 보고

2016. 12.

중랑물재생센터

시설관리과

수질측정기 유지보수 용역 설계변경(정산) 검토 보고

우리센터에서 시행중인 『중랑물재생센터 수질측정기 유지보수 용역』과 관련하여 최종 설계변경(정산) 시행하여 준공 처리코자 함

1		용역개요

□ 용 역 명 : 중랑물재생센터 수질측정기 유지보수 용역

□ 용역기간 : ‘16.06.01 ~ ‘16.12.31

□ 계약금액 : 109,830천원

□ 용역업체 : ㈜씨케이테크피아 대표 이동수

□ 용역내용

- 월2회 센터 수질측정기(7종82대) 정기점점, 정도점검, 긴급점검 등

□ 예산과목

- 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영, 공공운영비, 시설물안전점검비

2		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

-  점검 증감발생 및 공정물량(소모품) 증·감발생 등으로 인한 금액 변경

□ 용역비 변경현황(총금액 109,830천원 → 105,820천원, 감 4,010천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총용역비		109,830,000	105,820,000	감 4,010,000	(천단위절사)
직접노무비	정기점검	36,127,140	24,147,949	감 11,979,191
	소모품교체비	6,445,104	6,802,656	증 357,552
직접재료비	소모품비	50,372,400	59,280,940	증 8,908,540
제경비	일반관리비, 이윤, 부가가치세	16,886,356	15,588,455	감 1,296,901

□ 설계변경 금액 : 105,820천원

3		검토의견

□ 위와 같이 설계 변경(정산)하여 변경계약 추진코자 함

4		행정사항 및 향후계획

□ 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(시설보수과 ⇨ 관리과)

□ 최종 준공검사(감독)조서 시행

붙임. 1. 관련공문(설계변경 내역서 등) 1부

2. 합의각서 1부. 끝.