문서번호	정수과-14189
결재일자	2016.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김선례		代김경진	12/13 이성락
협 조
	주무관			박소현

배출수처리시설 운영관리용역 변경계약 추진

2016. 12.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

배출수처리시설 운영관리용역 변경계약 추진

2016년(2차수) 『배출수처리시설 운영관리용역』과 관련하여 보험료 실비정산에 따른 변경계약을 다음과 같이 추진하여 계약업무에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		계약 현황

○ 계약명 : 배출수처리시설 운영관리용역(영등포아리수정수센터)

○ 용역기간 : 2015. 10. 1 ~ 2018. 9. 30

○ 계약상대 : 브니엘네이처(주) 대표 박정호

○ 계약금액(2차수) : 금238,687,200원(총용역부기금액:금714,955,260원)

Ⅱ		변경계약 사항

○ 변경계약 내용

- 보험료 정산분 반영(건강보험, 국민연금, 장기요양보험) 및 경비조정

- 감액에 따른 총용역부기금액 조정

○ 세부 변경내역

- 변경금액 : 감액4,871,450원

․ 당초 : 금238,687,200원(총부기금액 금714,955,260원)

· 변경 : 금233,815,750원(총부기금액 금710,083,810원)

- 차수별 금액                                                  (단위:원)

구 분		당 초	변경후	변동사항	비 고
총용역비		714,955,260	710,083,810	감4,871,450원
차수별	1차(2015)	58,565,460	58,565,460	기성
	2차(2016)	238,687,200	233,815,750	감4,871,450원
	3차(2017)	238,687,200	238,687,200	없음
	4차(2018)	179,015,400	179,015,400	없음

Ⅲ		보고자 의견

○ 배출수처리시설 운영관리용역(2016년도, 2차수) 용역금액 중 보험료 등 정산분(금4,871,450원)만큼 감액코자 하며, 본청 재무과에 변경계약 의뢰하고자 함

붙 임 : 1. 합의서 1부.

2. 변경 내역서 1부.

3. 보험료 납부확인서 1부.  끝.