투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	총무과장
(경유)
제목	변경계약 체결요청(굴삭기)

조사연구과-2788(2016.12.13.)와 관련하여 『2016년 의정부터 발굴조사 중장비(굴삭기)임차용역』를 아래와 같이 계약을 변경하고자 합니다.

1. 용  역  명 : 2016년 의정부터 발굴조사 중장비(굴삭기)임차용역

2. 용역 내용 : 굴삭기(0.6㎡) 120품 임차

3. 계약 대상 : 대명건기(대표 : 김명자)

4. 변경 내용

구분	변경 전	변경 후	비고
계약금액	64,614,000원	51,152,750원	120품→95품 임차
준공기한	계약일로부터 12월 20일 까지	계약일로부터 12월 20일 까지	-

5. 변경 사유 : 행정자치부의 국유지 사용 미승인 통보로 조사지역 축소에 따른 임차일수 축소.

6. 예산 과목 : 문화본부 역사문화재과, 역사문화유산의 계승발전, 문화재 보존복원, 의정부터 발굴조사, 사무관리비(201-01)

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 과업지시서(변경) 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	조사연구과장
주무관	조치욱		조사연구과장	12/13 정명아
협조자
시행	조사연구과-2789	(		)	접수		(		)
우	03177		/	www.museum.seoul.kr
전화	02)724-0141	/전송	02)724-0206	/	201007312@seoul.go.kr	/	대시민공개