투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 시행(4회,최종) 포장도로 긴급복구

우리 사업소에서 시행중인 「2016년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)-북부」에 대하여 아래와 같이 설계변경(4회,최종) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)-북부

나. 공사개요 : 소규모 포장복구 86a, 절삭 덧씌우기 273a 등

다. 계 약 일 : 2016. 02. 15.

라. 공사기간 : 2016. 02. 19. ~ 2016. 12. 31.

마. 도 급 비 : 도급비 1,289,263,000원

바. 도 급 자 : ****************

사. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		설계변경 금액		증․감	비 고
		당 초	변 경
총공사비		1,665,000,000	1,647,962,000	감 17,038,000
도급비	공급가액	1,172,057,273	1,232,290,910	증 60,233,637
	부 가 세	117,205,727	123,229,090	증 6,023,363
	계	1,289,263,000	1,355,520,000	증 66,257,000
관 급 비		366,408,000	283,113,000	감 83,295,000
관 급 비		9,329,000	9,329,000	-

아. 설계변경 사유 : 공종별 정비물량 조정 등 ※ 별첨 설계변경사유서

자. 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임 : 1. 설계변경사유서 1부.

2. 계약금액조정 검증 확인서 1부.

3. 변경설계서 및 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	최병수		도로보수과장	이석재		북부도로사업소장	12/13 신응수
협조자	주무관	최완		계약1팀장	조현
시행	도로보수과-12140	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동)	/
전화	02-944-5434	/전송	02-945-5072	/	cbs0656@seoul.go.kr	/	부분공개(6)