“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	(긴급)홍대 걷고싶은거리 문화관광 명소화 전기공사 재변경 계약 의뢰

1. 관광정책과-15862(2016.12.13.)호와 관련입니다.

2. 시행 중인 홍대 걷고싶은거리 문화관광 명소화 전기공사의 설계변경을 아래와 같이 시행코자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 홍대 걷고싶은거리 문화관광 명소화 전기공사

나. 공사기간 : ’16.10.25 ~ ’17.3.15

다. 도 급 액 : 146,979,650원

라. 예산과목 : 관광사업과, 서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화, 서울
강점 특화관광 콘텐츠 확충, 서울 매력명소 관광자원 개발 활용, 시설비

마. 설계변경내역

구 분	변 경 내 용
계약금액	당 초	146,979,650원
	변경후	154,532,000원
	증․감액	(증) 7,552,350원

바. 설계변경사유

- 보안등 설치 수량 조정(46식→47식)

- CCTV 이설을 위한 지주 설치(3식)

붙  임 : 1. 설계변경계획 방침 1부.
2. 합의각서 1부.
3. 설계내역서 1부. 끝.

	관광정책과장
주무관	김보경		지역관광진흥팀장	권영문		관광정책과장	12/13 代조성호
협조자
시행	관광정책과-15870	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	2133-2817	/전송	2133-1067	/	megbkkim@seoul.go.kr	/	부분공개(6)