함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	'우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시 설계 용역' 변경 계약 의뢰

1. 재무과-21485(2016. 5. 2.)호와 관련입니다

2. 우리시와 계약 체결하고 추진 중인 아래 용역에 대하여 계약 내용 변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시 설계 용역

2) 용역기간 : ’16. 5. 2. ~ ’16. 12. 27.

2) 계 약 자 : ㈜한국종합기술 대표 이강록 외 1개사

3) 계약금액 : 금284,570,000원

나. 변경내용

1) 계약금액 변동

가) 당초 금284,570,000원 → 변경 금283,107,000원(감 1,463,000원)

나) 변동사유 : 손해배상 보험료를 실제 납부한 금액으로 정산

2) 계약기간 변동

가) 당초 ’16. 5. 2. ~ 12. 27. → 변경 ’17. 2. 28.

나) 변동사유 : 공원 협의에 기간 소요, 설계VE 결과 반영을 위해 추가 기간 필요

붙  임 : 1. 설계변경 검토보고(변경내역서 포함) 1부

2. 합의각서 1부.  끝.

	계획설계과장
주무관	최영서		계획설계과장	12/13 이임섭
협조자	주무관	문정혜		주무관	김성민
시행	계획설계과-10593	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1414	/전송	3146-1429	/	9373@seoul.go.kr	/	대시민공개