문서번호	계획설계과-10569
결재일자	2016.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	계획설계과장	급수부장	경영관리부장
양윤선	이임섭	代이임섭	12/13 정진일
협 조

『낙산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역』 준공기한 연기 보고서

2016. 12.

상수도사업본부

급수부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	중간보고회의 (’16. 10. 21.)
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『낙산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역』

준공기한 연기 보고

「낙산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역」과 관련하여 설계경제성(VE) 심사 결과를 설계에 반영하기 위한 처리기간이 소요되어 용역 준공기한을 연기하고자 함.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 낙산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역

□ 용역내용

○ 배수지 건설 용량  : 2,000㎥

- 송배수관 부설 : D=400㎜, L=670m

○ 총사업비 : 3,460백만원

□ 용역기간 : 2016. 4. 29. ~ 2016. 12. 31.

□ 용역업체 : ㈜동일기술공사

□ 계약금액 : 120,615천원

Ⅱ		추진경위

□ 용역 착수                                          : ’16. 4. 29.

□ TF팀 회의                                         : ’16. 5. 17.

○ 참석자(27명) : 급수부장 등 본부 및 TF팀원(21명), 용역사(6명)

○ 주요내용 : 용역의 목적 및 과업 설명, TF팀 부서별 의견 수렴

□ 착수보고회 개최                                    : ’16. 6. 17.

○ 참석자(45명) : 급수부장 등 본부 및 TF팀원(29명),

분야별 외부 자문위원(4명), 용역사(12명)

○ 주요내용 : 급수구역 및 배수지 시설계획, 시설물·송수관로 계획

단계별 과업수행 계획 등

□ 중간보고회 개최                                   : ’16. 10. 21

○ 참석자(35명) : 급수부장, 시설안전부장 등 본부 및 TF팀원(24명),

분야별 외부 자문위원(3명), 용역사(8명)

○ 주요내용

- 배수지 구조물 배치 및 용량계획, 급수구역 조정방안, 송배수관 노선

- 도시계획 시설결정(안), 기타 공사 중 소음・진동 관리 방안 등

□ 도시계획시설(수도공급설비) 결정(안) 열람공고 : ’16. 10.  27. ～ 11. 9.

○ 도시계획시설 결정 요청 : ’16. 10. 14.(급수부 → 본청 시설계획과)

※ 도시계획시설(수도) 결정 없이 사용중인 기존 낙산배수지(신설낙산배수지 옆)와 함께 도시계획시설 결정 면적 확정

□ 설계경제성 심사 (급수부)                          : ’16. 12.  2.

※ 총공사비 50억원 이하(3,460백만원)로 자체 VE 시행

Ⅲ		준공기한 연기사유

□ 설계경제성 심사 결과에 대한 설계반영 소요기간 부족

○ 본부 급수부에서 ’16. 12. 7. ~ 12. 14.까지 설계경제성 심사를 시행하고, 이후 심사 결과가 보고(예정일 ’16. 12. 26.)되므로 당초 준공기한(’16. 12. 31.)까지 설계 반영이 곤란

□ 도시계획위원회 심의 절차 이행 및 심의결과 설계반영에 따른 소요기간 필요

○ 도시계획위원회 심의(예정) :                      ’16. 12. 21.

- 도시계획시설(수도공급설비) 결정 심의

○ 도시계획심의 결과 통보(예정) :                    ’16. 12. 28.

○ 도시계획 시설 결정 및 고시(예정) :                ’17.  1.  5.

○ 도시계획사업 실시계획 인가 고시 :                 ’17.  2.  16.

Ⅳ		준공기한 연기

○ 당초 : 2016. 4. 29. ~ 2016. 12. 31.

○ 변경 : 2016. 4. 29. ~ 2017. 2. 28.(59일 연기)

※ 지체상금 부과 여부 : 미부과.  끝.