문서번호	시설과-9158
결재일자	2016.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김영수	김경수	김재균	12/13 이용태
협 조
	재무팀장		정금자

『2016년 남산 및 산하공원 시설물 보수정비공사(단가계약)』

설계변경(2회)정산보고

2016. 12

중부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

『2016년 남산 및 산하공원 시설물 보수정비공사』

설계변경(2회)정산보고

『2016년 남산 및 산하공원 시설물 보수정비공사』시행과 관련하여 현장여건 및 시공물량의 증.감 발생에 따라 설계변경 및 정산을 시행

코자 함

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 2016년 남산 및 산하공원 시설물 보수정비공사(단가계약)

공사개요

토공 332㎥, 콘크리트공 17㎥, 시설물도장 3,880㎡

상수도관 463m, 기타 시설물정비 1식

공사기간 : 2016.03.21. ~ 2016.12.30

계약금액 : 200,000,000원

도 급 자 : ㈜효상토건 김명식

Ⅱ		설계변경 내용

설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증	비고
공 사 비		200,000,000	279,500,000	79,500,000
도급비	공급가액	181,818,182	254,090,910	72,272,728
	부 가 세	18,181,818	25,409,090	7,227,272

물량증감 내역

공 종	변 경 내 용	비고
토 공	0 토공량증가 332㎥→425㎥, 터파기 및 되메우기량 증가
2. 구조물공	0 콘크리트감소 17㎥→54㎥, 레미콘타설 공종등 증가
3. 도 장 공	0 도장공증가3,880㎡→5,473㎥, 유성도장 및 오일스텐증가
4. 포 장 공	0 포장물량감소24@→30@, 콘크리트 및 아스콘물량증가
5. 시설물공	0 상수도463m,데크15m, 경계석설치 및 방수공증가
6. 부 대 공	0 기타 신공종 및 물량증감 발생

설계변경 사유

남산 및 산하공원내 시설물추가 정비등 현장여건 및 시공물량

증,감 발생

- 남산 장충테니스장 노후시설 정비계획(시설과-8041)

- 용산가족공원 산책로 정비계획(시설과-7752)

- 주차장 장애인 추자구역 조정보고 (운영과-18147)

- 남산공원 민원발생보고(시설과-7218)

- 공원내 민원해소 및 각종 시설물 보수정비

공원내 주민편의 및 안전사고 예방을 위한 긴급정비(누수복구,소규모포장등)에 따른 시공물량 증·감 및 신규공종 발생

공원시설물 유지관리 및 민원해소를 위한 작업지시에 따른 설계변경(산규비목) 단가는 협의 및 평균단가 적용

- 상수관로부설공종등 16개소

Ⅲ		행정사항

『설계변경 내용』과 관련하여 현장여건에 따른 신규공종 발생 및

물량변동 사항에 대하여 설계변경 및 정산시행

공사에 소요되는 증액예산은『장충테니스장 정비사업』배정예산과

낙찰차액을 일부 할용

공원의 효율적 관리와 시설물의 신속한 정비를 위하여 배정예산

및 낙찰차액 예산을 활용하여 설계변경 하고자 함

예 산 과 목	금 액	비 고
남산및산하공원 시설물보수정비사업,남산및산하공원 시설물보수정비,시설비	39,500,000	배정예산 및 낙찰차액
공원녹지정책과,시공원유지관리및보수정비,시설비 (도시개발특별회계)	40,000,000
계	79,500,000

붙 임 : 변경설계서 1부. 끝.