투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구) 변경 계약의뢰

1. 도시철도사업부-11436호(2016.12.09)와 관련입니다.

2. 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구)과 관련하여 물가변동(제1회) 및 예산집행계획 조정으로 인하여 아래와 같이 변경계약 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구)

나. 계 약 자 : ㈜유신외 2개사

다. 용역기간

구 분	당 초	변 경	비 고
총 괄	2011.11.01 ~ 2021.04.17	2011.11.01 ~ 2021.09.07
1 차	2011.11.01 ~ 2017.04.30	2011.11.01 ~ 2017.07.20

라. 용역금액 조정 내역                             (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	사 유
총괄 (1회)	3,118,806,000	3,124,636,000	증)5,830,000	- 계약금액 : 증)5,830,000 - 사 유 ․ 물가변동분 반영
1차 (2회)	376,000,000	335,379,000	감)40,621,000	- 계약금액 : 감)40,621,000 - 사 유 ․ 예산집행계획 조정 감) 40,621,000 ․ 물가변동 반영 증) 5,830,000 ․ 투입계획 조정 감) 5,830,000

마. 예산과목 :

- 신교통수단도입, 경전철 건설사업, 신림선 경전철 건설, 시설비 및 부대비

감리비(도시철도특별회계)

첨 부  1) 계약금액 조정 검토보고서 1부

2) 감리 변경설계서(총괄1회 및 1차2회) 각 1부.

3) 총괄1회 변경설계서 1부.

4) 제1차 2회 변경설계서 1부.

5) 합의각서 1부 . 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	최영준		신교통1과장	김종상		도시철도사업부장	12/13 박동룡
협조자	주무관	이덕배		계약2팀장	양주춘
시행	도시철도사업부-11566	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7187	/전송	02-772-7305	/		/	부분공개(5 6)