투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	시설공사 변경 계약의뢰 [도시고속도로 연결램프(정릉길)설치공사]

1. 우리 본부에서 시행중인『도시고속도로 연결램프(정릉길)설치공사』전체3회, 2차2회분을 시행하고자 변경계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 도시고속도로 연결램프(정릉길)설치공사(전체3회, 2차2회)

나. 계약금액 및 기간 변경내역

구 분		당초	변경	증·감
전체 (3회)	계약금액	9,589,800천원	9,717,900천원	증 128,000천원
	기간	`13.12.30~`16.12.29	`13.12.30~`16.12.29	변경없음
2차 (2회)	계약금액	3,051,000천원	3,205,000천원	감 154,000천원
	기간	`15.12.31~`16.12.27	`15.12.31~`16.12.27	변경없음

다. 계약방법 : 장기계속공사 전체 및 2차분 공사 변경계약

라. 계 약 자 : 풍림산업(주), 흥일토건(주)

마. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 도시고속도로망 확충(도시개발특별회계), 도시고속도로연결램프 추가설치, 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임 :  설계내역서(용량초과 별송), 검토보고서, 합의각서, 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	남덕희		도시고속도로과장	명경출		토목부장	12/13 김영수
협조자	계약1팀장	조현
시행	토목부-25720	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/	heedeok@seoul.go.kr	/	부분공개(6)