“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	변경계약 및 준공기한 연기 의뢰[내부순환로(월곡IC) 구조개선 타당성조사 용역]

1. 도로계획과-17955호(2016.12.13.)와 관련입니다.

2. 우리 과에서 시행 중인 “내부순환로(월곡IC) 구조개선 타당성조사 용역”에 대하여 아래와 같이 계약 변경 및 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 내부순환로(월곡IC) 구조개선 타당성조사 용역

나. 계약기간 변경

- 당 초 : 2016. 4. 19 ~ 2016. 12. 15.

- 변 경 : 2016. 4. 19 ~ 2017.  2. 15.

다. 계 약 자 : ㈜동해종합기술공사

라. 계약금액 변경내역

(단위 : 원)

구분	당 초	변 경	증·감	비 고
계약금액	57,825,600	73,128,000	증) 15,302,400

마. 변경사유 : 내부순환로와 북부간선도로 직결체계 요구에 따른 추가 교통량 현황조사로 인한 계약금액 증액 및 준공기한 연기

바. 예산과목(도시개발특별회계)

- 안전총괄본부 도로계획과, 도로건설, 도시고속도로망 확충, 내부순환로 구조개선 타당성조사, 시설비

붙임 : 1. 계약변경 시행  및 준공기한 연기 방침(내부품의) 각 1부.

2. 변경 내역서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.

4. 변경계약 및 준공기한 연기 합의서 1부.   끝.

	도로계획과장
전문관	이성주		도로시설계획팀장	국중진		도로계획과장	12/13 하종현
협조자
시행	도로계획과-17978	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 10층	/
전화	02-2133-8082	/전송	02-2133-0764	/	sjlee5794@seoul.go.kr	/	대시민공개