문서번호	생산관리과-17299
결재일자	2016.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생산관리과장	생산부장		경영관리부장
신왕근	한희선	구자훈		12/13 정진일
협 조
	기획예산과장		박진용
	주무관		김성민

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 공사』

건설사업관리 용역 예산확보 계획

2016.  12.

상수도사업본부

(생산부 생산관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 공사』

건설사업관리 용역 예산확보 계획

“뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 공사” 품질확보 및 안전관리 등을 위하여 수행중 인 건설사업관리용역의 용역기한 연장에 따른 계약금액이 변경됨에 따라 이에 필요한  예산확보  계획을 보고 드림.

Ⅰ		용역 개요

❍ 용 역 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 건설사업관리용역

❍ 용역기간 : 2016. 03. 08. ~ 2016. 12. 31.

❍ 계약금액 : 431,420,000원

❍ 계 약 자 : ㈜한국종합기술 외 1개사

❍ 용역대상 : 뚝도정수센터 농축조공사 토목, 기계, 전기 및 통신공사

Ⅱ		계약변경 내용

❍ 뚝도정수센터 농축조 공사(토목,기계) 공사기간 연장에 따른 용역기간 연장 및 계약금액 변경

구분	용역기간	기술자 배치계획			용역금액(천원)	증/감(천원)	비 고
당초	’16.03.08. ~ ’16.12.31. (10.0개월)	책임	10	개월	431,420
		기계	4	개월
		전기	4	개월
		토목	10	개월
변경	2016.03.08. ~ ’17.07.14. (14.7개월)	책임	14.2	개월	562,100	130,680
		기계	3.5	개월
		전기	3.5	개월
		토목	14.7	개월

Ⅲ		예산확보 계획

❍ 「뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 사업」의 “시설비” 일부를 조정 하여 동 사업의 “감리비”로 세목조정 활용하고자 함

❍ 변경예산 : 130,680천원

(단위 : 천원)

예산과목			예산현액	예산조정		변경 후 예산액	비고
세부사업	목	세목		증	감
뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 (12103)	시설비및 부대비 (401)	시설비(01)	7,196,287	-	△130,680	7,065,607
		감리비(02)	496,700	130,680	-	627,380

Ⅳ		향후 계획

❍ 상기 계획과 같이 건설사업관리 용역 예산을 추가 확보한 후 건설사업

관리 용역 변경 계약하여 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 사업 추진에

만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 세출예산 조정사용 내역서 1부.

2. 용역기간 연장 및 계약금액 변경 검토 방침서. 1부.

3. 계약금액 조정 결과 통보 공문 1부. 끝.