함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고[우면산가압장 급수체계 개선 및 실시 설계 용역]

1. 계획설계과-10593(‘16.12.13)호와 관련입니다.

2. 『우면산가압장 급수체계 개선 및 실시 설계 용역』에 대한 변경계약을 아래와 같이 체결하고자 합니다.

가. 계 약 자 :*****************: 이강록외 1

나. 용역내용 : 설계 경제성 심사 및 심의결과 설계반영 여부 등

다. 계약기간 : 2016.05.02. ∼2016.12.27.

라. 변경계약 현황                                   (단위 : 원)

구 분	당 초		변 경		비 고
	용역기간	계약금액	용역기간	계약금액
계약기간	‘16.05.02.∼ ’16.12.27.	284,570,000	‘16.05.02.∼ ’16.12.27.	283,107,000	감 1,463,000

마. 변경사유

- 기  간 : 도시계획위원회 심의절차 이행에 따른 소요기간

- 금  액 : 손해배상 보험료를 실 납부금액으로 정산 등

붙임 : 1. 합의서 1부.

2. 변경계약 방침 보고서(본부장) 1부.

3. 변경계약 연기조치 관련공문 1부. 끝.

주무관	김경식		재무회계과장	박병식		요금관리부장	12/14 박병만
협조자
시행	재무회계과-17863	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1231	/전송	02-3146-1209	/		/	부분공개(7)