투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	동부엔지니어링(주) 대표이사 귀하
(경유)
제 목	여의도샛강 합류부 생태거점 조성사업 기본 및 실시설계용역 설계변경 및 준공기한 연장 안내

1. 우리시정에 적극 협조하여 주시는 귀 사에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

2. 우리본부에서 귀 사와 계약체결하여 추진 중인 ｢여의도샛강 합류부 생태  거점 조성사업 기본 및 실시설계용역｣과 관련하여, 아래와 같이 설계변경 및 준공기한 연장  코자 하오니 변경계약 등 업무 조치하시기 바랍니다.

가. 용역 개요

- 용 역 명 : 여의도샛강 합류부 생태거점 조성사업 기본 및 실시설계용역

- 용역기간 : 2016. 5. 17 ~ 12. 22

- 용 역 비 : 235,400천원

- 용 역 사 : 동부엔지니어링(주), 유신(주)

나. 용역비 변경현황

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감
용 역 비	235,400,000	250,400,000	증 15,000,000

- 변경내용 : 서울시 설계경제성 심사제도 개선방안에 따라 설계경제성                                   (VE) 심사에 필요한 심사위원 비용(15,000천원) 반영 조치

※ 「서울시 설계경제성 심사제도 개선방안」 [계약심사과-10559호(2015.6.15.)와 관련임]

다. 준공기한 연장 : 78일 연장

구 분	용 역 기 간	용역비(원)	비고
당 초	2016. 5. 17 ~ 12. 22	235,400,000
변 경	2016. 5. 17 ~ 2017. 3. 10	250,400,000

끝.

	서울특별시한강사업본부장
★주무관	김대호		생태공원과장	전결 12/14 최병언
협조자
시행	생태공원과-4021	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02)3780-0631	/전송	02)3780-0745	/	wood91@seoul.go.kr	/	대시민공개