문서번호	도시철도토목부-15698
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목3과장	도시철도토목부장
정성환		김정수	12/14 김진팔
협조
	주무관		정삼기

『하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사』

건설폐기물처리용역 설계변경 검토보고(2차 1회)

2016. 12.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사』

건설폐기물처리용역 설계변경 검토보고(2차 1회)

『하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사』 책임건설사업관리단장으로부터 공사장발생 폐기물의 원할한 처리를 위한 건설폐기물처리용역(2차) 준공기한 연기요청 사항에 대한 설계변경 검토보고 임.

□ 관련근거

○ 과업내용서 3.3(설계변경 조건)

- 과업수행 중 발주처 과업내용 변경

○ 책임건설사업관리단 계약변경 요청 – 하남16-949호(16.12.13)와 관련 임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 건설폐기물처리용역

○ 규    모 : 총 폐기물 21,416톤(폐아스콘 10,219, 폐콘크리트 10,906, 건설 291)

○ 계 약 자 : 대진환경산업㈜  대표 장인자

○ 계약금액 : 금555,108,000원 (2차 : 금 84,953,000)

- 2차 폐기물 : 3,362톤(폐아스콘 1,590, 폐콘크리트 1,772)

○ 용역기간 : 총괄 2015.08.24 ~ 2019.03.28

2차 2015.09.21 ~ 2016.12.31

○ 공정율 : 총괄 33.5%(2차 0.00%)  ☞ 2016.12.12현재

□ 추진경위

○′15.03.27 : 하남선1-1공구 건설공사(총괄·1차) 계약

○′15.03.30 : 하남선1-1공구 건설공사(1차) 착공

○′15.06.23 : 하남선1-1공구 건설폐기물처리용역(총괄·1차) 계약의뢰

○′15.08.24 : 하남선1-1공구 건설폐기물처리용역(총괄·1차) 계약

○′15.12.31 : 1차 1회 변경계약(계약기간 연기)

○′16.06.28 : 1차 2회 변경계약(계약기간 연기)

○′16.06.28 : 1차 2회 변경계약(계약기간 연기)

○′16.09.21 : 2차 계약

○′16.112.03 : 1차 3회 변경계약 의뢰(재무과-물량 증·감)

□ 검토내용

○ 설계변경 사유

- 본선 1구간(시점부) 경찰서 업무협의 지연에 따른 폐기물발생 지연

○ 설계 변경(안)

- 건설폐기물 처리현황

구 분	단위	발주현황			1차 폐기물 ('16.12.12기준)		2차 잔여량
		1차	2차	계	처리량	잔량
폐콘크리트	ton	4,777.65	1,772	6,549.65	4,693.25	84.4	1,772
폐아스콘	ton	2,495.93	1,590	4,085.93	2,495.93	0	1,590

- 폐기물 잔량 처리계획

구 분	단위	당초	변경	처리누계량 (‘16.12.12)	잔여량	잔량 처리계획
폐콘크리트	ton	1,772	1,772	-	1,772	- 공사구간 내에 기존구조물 및 기타 등 잔량 처리계획
폐아스콘	ton	1,590	1,590	-	1,590	- 공사구간내에 교통전환 및 도로복구에 따른 잔량처리 계획

- 폐기물 월별 처리계획

구 분	단위	잔여량	‘16년	‘17년						비 고
			12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
폐콘크리트	ton	1,772	250	250	250	250	250	250	272
폐아스콘	ton	1,590	700	200	100	100	200	200	90

- 계약금액 조정 : 변경 없음

구 분	당 초		변 경		증·감		비 고
	수량(톤)	금액(천원)	수량(톤)	금액(천원)	수량(톤)	금액(천원)
폐콘크리트	1,772	43,748	1,772	43,748	증감없음	증감없음
폐아스콘	1,590	41,205	1,590	41,205	증감없음	증감없음
합 계	3,362.0	84,953	3,362.0	84,953	증감없음	증감없음

- 계약기간 조정 : 변경

․당 초 : 2016.09.21. ~ 2016.12.31.

․변 경 : 2016.09.21. ~ 2017.06.30.

○ 책임건설사업관리단 의견

- 2차 용역계약에 대하여 공사공정에 따른 폐기물처리가 지연되고 있어 용역기간 연장(181일)을 통하여 잔여물량 처리 타당.

□ 보고자 의견

○ 상기 설계변경 검토내용과 같이 “하남선1-1공구 건설폐기물처리용역(2차)” 책임건설사업관리단의 준공기한 연기요청 사항에 대하여 사업관리단장 의견을 반영 2차 계약금액 조정없이 계약(준공)기간 을 연장(181일) 설계변경 계약의뢰 조치코자 합니다.

붙임 : 1. 2차 준공기한 연기요청 공문 등 1부.

2. 변경 합의 각서 1부.  끝.