함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경에 따른 계약의뢰(2016년 대현산배수지외 4개소 항 청소 용역)

우리사업소에서 시행한 아래 용역에 대하여 설계변경을 시행하고 다음과 같이 변경계약 의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 대현산배수지외 4개소 항 청소 용역

나. 도 급 자 : ㈜태완씨앤씨 대표 김 형 국

다. 계약기간 : 2016.04.18 ~ 2016.12.31

라. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,기타교체비(배수지항청소)

마. 설계변경사유: 세정제 물량변동 및 제경비 정산 등에 따른 변동

바. 설계변경 내역                                               (단위:원)

구분		당초	변경	증감
총용역비		272,155,890	256,454,000	-15,701,890
도급비	공급가액	247,414,446	233,140,000	-14,274,446
	부가가치세	24,741,444	23,314,000	-1,427,444
	계	272,155,890	256,454,000	-15,701,890

따로븥임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 변경 합의서 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	손종백		급수설비팀장	배성호		급수운영과장	전결 12/14 오기석
협조자
시행	급수운영과-31719	(		)	접수		(		)
우	04744	서울시 성동구 행당1동 142-1	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2747	/전송	3146-2789	/	SJB0119@seoul.go.kr	/	대시민공개