문서번호	정수시설과-13134
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동		유영춘	12/14 이성락
협조

기계설비 유지보수 공사(연간단가) 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

영등포아리수정수센터

『기계설비 유지보수 공사』설계변경 보고

우리 정수센터 기계설비 유지보수공사(연간단가) 시행중 설계변경 사항이 발생하여 설계변경을 시행하고자 보고함.

개요

◯ 공 사 명 : 기계설비 유지보수 공사(연간단가)

◯ 공사기간 : 2016. 05. 04. ～ 12. 31.

◯ 공사금액 : 금140,525,740원

◯ 시공업체 : 대영이앤디(주) 대표 박준철

◯ 변경내용 : 별첨 “설계내역서” 참조

◯ 설계변경 관련근거

- 지방자치단체 공사계약일반조건 제4장(행정안전부예규 제253호)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장8절,13장6절(행정안전부예규 제34호)

설계변경 사항

◯ 신규공정 발생 및 시공물량 증․감에 따른 설계변경

- 막여과 섬유여과유입펌프 1,2호 수리(작업지시 1차분)

- 막여과 CIP약품공급펌프 수리(작업지시 3차분)

- 중앙제어실 냉방기 실외기함 설치(작업지시 3차분)

- 생태연못 분수설비 3대 설치(작업지시 4차분)

- 1정수장 여과지 콤프레샤 1호 수리(작업지시 5차분)

- 막여과 약품(황산)투입펌프 수리(작업지시 5차분)

- 2정수장 활성탄흡착지 1지 정수유출밸브 교체(작업지시 6차분)

- 막여과 3계열 공기유입 밸브 및 감압밸브 교체(작업지시 6차분)

- 막여과 사무실 환기설비 개선(작업지시 7차분)

- 2정수장 약품투입실 PAC DAY탱크 보온(작업지시 7차분)

- 물량증감내역 : “설계변경내역서” 참조

◯ 건강 및 연금보험료, 노인장기요양보험료 삭감

- 공사계약 일반조건 제40조의 2에 의거 시공사측에서 납부한 사실이 없기에 삭감처리

◯ 환경보전비 삭감

- 환경보전비 미사용에 따른 삭감

◯ 공사비 증감 내역

구 분	재 료 비	노 무 비	제 경 비	공사원가	부가가치세	총 공 사 비
변 경 전	59,358,531	41,195,478	27,450,025	127,760,673	12,775,067	140,525,740
변 경 후	79,431,110	24,769,100	22,391,791	126,400,000	12,640,000	139,040,000
증 감 액	증 20,072,579	감 16,426,378	감 5,058,234	감 1,360,673	감 135,067	감 1,485,740

조치계획

◯ 변경된 설계내용에 따라 건설공사 설계변경 심의 및 기성준공 처리절차 운영계획에 의거 설계변경 심의위원회를 개최하여 처리하고자 합니다.

첨부 : 1. 설계변경 내역서 1부

2. 계약금액조정 검증확인서 1부. 끝.