투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	용역 변경 계약 의뢰 [서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구) 감독권한대행등 건설사업관리용역(1차)]

1. 도시철도토목부-15651호(2016.12.14.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인『서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구) 감독권한대해등 건설사업관리용역(계속공사)』에 대하여 아래와 같이 변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(2공구) 감독권한대행등 건설사업관리용역(계속공사)

나. 계약금액 : 일금 903,500,000원

다. 계 약 자 : ㈜도화엔지니어링, ㈜대건엔지니어링

라. 변경사항

구 분		당 초	변 경	증,감	비 고
총차	계약금액	903,500,000원	903,500,000원	-	변경없음
	용역기간	2016.09.01. ~2018.01.31.	2016.09.01. ~2018.01.31.	-	변경없음
1차	계약금액	194,330,000원	160,000,000원	34,330,000원 감
	용역기간	2016.09.01. ~2016.12.31.	2016.09.01. ~2016.12.31.	-	변경없음

마. 변경사유 : 궤도공사 공정진행에 따른 건설사업관리기술자 조정 배치

붙임 : 1. 관련문서 사본  1 부.

2. 설계변경 내역서(1차 1회) 1 부.

3. 합의각서       1 부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	성원배		궤도과장	代정중규		도시철도토목부장	12/14 김진팔
협조자	주무관	최경호
시행	도시철도토목부-15697	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 9층 (무교동 96)	/
전화	02-772-7241	/전송	02-772-7306	/	parandal@seoul.go.kr	/	부분공개(5)