문서번호	경제정책과-19324
결재일자	2016.12.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	홍릉클러스터팀장	산업거점조성반장
김학현	이남숙	12/14 김재진

- 상월곡 ‘사이언스 스테이션’ 조성을 위한 -

전기공사 계약 변경 계획

2016.12.

경제진흥본부

(산업거점조성반)

- 상월곡 ‘사이언스 스테이션’ 조성 관련 -

전기공사 계약 변경 계획

사이언스 스테이션 조성을 위한 전기공사 시행관련 관계자 협의 및 전시시설 설치 지연에 따라 전기공사 계약을 변경(기간연장) 하고자 함

□ 공사개요

○ 용 역 명: 상월곡역 사이언스 스테이션 조성을 위한 전기공사

- 전기실에서 사이언스 스테이션까지 간선 및 분전반 설치

○ 계약업체: (주)보령전설

○ 계약금액: 금22,321,420원

○ 계약기간: 2016.11.24. ~ 2016.12.14.

□ 설계변경 계획

○ 변경내용

구분	당 초	변 경	비 고
계약기간	2016.11.24. ~ 2016.12.14.	2016.11.24. ~ 2017. 1.20.	37일 연장

○ 변경사유

- 공사 진행을 위한 전시시설 설치업체 및 도시철도공사 각 부서와의 공사 과업 협의 및 조정

- 전철 운행에 따른 전기작업 제한(야간 및 제한된 시간 안에 작업실시와 케이블 주문제작으로 인한 연기 등)

○ 예산과목

- 경제진흥본부 경제정책과, 활력이 넘치는 경제환경구축, 기업활동지원체계 구축, 홍릉창조경제 지식단지 조성, 시설비(401-01)

□ 향후계획

○ 계약 변경 의뢰('16.12.14), 준공(’17.1. 20)