문서번호	정수과-5673
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
최재호		하은경	12/14 임정규
협 조
	주무관			김덕기
	주무관			백석현

장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성 용역

사고이월 보고

2016. 12.

암사아리수정수센터

( 정  수  과 )

장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성 용역

사고이월 보고

「장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성 용역」과 관련하여 환경부의 승인검토, 검토사항 보완 등 처리기간이 추가 소요되어 ’16년 지출이 어려움에 따라 사고이월하고자 함.

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성 용역

□ 용역기간 : 2016. 7. 1. ~ 2017. 3. 31.

□ 용역업체 : 한국산업안전관리원주식회사

□ 계약금액 : 41,918,150원

○ 예산과목 : (관)상수도사업비용(항)영업비용(세항)정수비(목)수선유지교체비(세목)기타교체비

Ⅱ		추 진 경 과

□ 용역계약 체결                                      : ’16. 6. 17.

□ 착수보고회 개최                                    : ’16. 7. 8.

□ 장외영향평가서 검토요청                            : ’16.10. 5.

○ 장외영향평가서 제출(암사정수센터 ⇒ 화학물질안전원)

□ 위해관리계획서 검토요청                            : ’16.10. 14.

○ 위해관리계획서 제출(암사정수센터 ⇒ 화학물질안전원)

□ 중간 보고회 개최                                   : ’16. 11. 3.

□ 장외영향평가서 보완 요청 접수                      : ’16. 11. 8.

○ 장외영향평가서 내용을 보완하여 제출하도록 요청받음(’16.11.29 까지)

□ 준공기한 연기                                      : ’16. 11. 23.

○ 기존 ’16.11.29  ⇒  변경 ’17.3.31

□ 위해관리계획서 보완 요청 접수                      : ’16. 11. 28.

○ 위해관리계획서 내용을 보완하여 제출하도록 요청받음(’16.12.21 까지)

□ 위해관리계획서 보완 제출                           : ’16. 12. 8.

○ 위해관리계획서 내용을 보완하여 제출함(암사정수센터 ⇒ 화학물질안전원)

Ⅲ		사고이월 사유

□ 사 유

○ 장외영향평가서 및 위해관리계획서를 작성․제출(’16.10.5, ’16.10.14) 하였으나, 보완 요청이 접수(’16.11.8, ’16.11.28)되어 위해관리계획서는 보완 후 제출(’16.12.8)하여 환경부 검토중이며, 장외영향평가서는 보완서류 작성중임

○ 환경부 화학물질안전원의 검토 기간이 30일 이상 소요되고 있으며, 보완서류 작성을 위한 시설검토에도 추가로 기간이 필요한 상황으로 연내 처리가 어려워 부득이 사고이월 하고자함

Ⅳ		향 후 계 획

□ 2016 회계연도 세출예산 이월 대상사업 제출(행정관리과).

붙임	1. 이월사업별명세서 1부

2. 사고이월요구서 1부.  끝.