문서번호	교통운영과-24163
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교통개선팀장	교통운영과장
임홍필		이용구	12/14 강진동
협조
	주무관		박평근

장지동길 교통체계개선 기본 및 실시설계 설계변경 보고

2016.12

도시교통본부

(교통운영과)

설계변경(정산) 보고

장지동길 교통체계개선 기본 및 실시설계 용역과 관련하여 설계자문비 등 실정산에 따른 설계변경(정산)을 보고함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 장지동길 교통체계개선 기본 및 실시설계

○ 용역규모 : 장지동길 교통체계 개선 폭4차로, 연장2.6km

○ 용역기간 : 2016. 2.16. ~ 2016.12.30

○ 용 역 비 : 100,144,000원

○ 용 역 사 : 에이스톤엔지니어링㈜ 대표 이영순, ㈜대광엔지니어링 대표 임연택

□ 설계변경내용                                             (단위 : 원)

구 분	계약금액(당초)	변경금액(변경)	증․감 금액	비 고
기본설계비	32,724,148	32,724,148	-
실시설계비	18,365,718	18,365,718	-
제경비	22,952,787	22,952,787	-
기술료	8,763,711	8,763,529	감182
전력시설물 설계비	7,475,000	7,595,000	증120,000
손해배상보험료	395,000	457,000	증62,000
순원가	90,676,364	90,858,182	증181,818
부가가치세	9,067,636	9,085,818	증18,182
설계자문비	400,000	200,000	감200,000원
총용역비	100,144,000	100,144,000	-

□ 설계변경 사유

○ 설계자문비 실정산, 전력시설물 설계비 변경

○ 손해배상보험료 조정에 따른 계약금액 조정

□ 조치계획

○ 위 보고 내용대로 아래와 같이 설계변경 정산처리하고자 함

- 당초 계약금액 : 100,144,000원

- 변경 정산금액 : 100,144,000원(증감없음)

첨 부 : 1. 설계변경 요청공문 1부.

2. 설계변경내역서 1부. 끝.