투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	(주)원건설
(경유)
제목	교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사 변경 승인 통보(은평뉴타운3단지)

1. 항상 시정 발전에 협조하여 주시는 귀사에 감사드립니다.

2. 도로보수과11592(2016.11.22.), 원건설16-55(2016.12.13.)호와 관련, 교통안전시설(노면표시) 원인자 부담공사 변경요청에 대하여 아래와 같이 변경 승인 통보하오니 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 은평뉴타운3단지 힐데스하임 주상복합 신축 교통안전시설 원인자부담공사(노면표시)

나. 규제승인 : 서울지방경찰청 교통관리과-23128(2016.08.12)

다. 위    치 : 은평구 진관동 69-8(은평뉴타운3단지)

라. 변경내역

구 분	공 사 내 역		공 사 기 간		원인자	비 고
	당 초	변 경	당 초	변 경
노면표시 도색 및 제거	286m	348m	2016.11.22 ~ 2016.12.15	2016.11.22 ~ 2017.01.15	㈜원건설

마. 연기사유 : 은평구청 요청에 의한 아스팔트 평삭후 재포장에 따른 물량  및 공사기간 변경.

※ 공사 준공시 T-GIS(2016-0207-102)에 사전 입력되어야 준공이 가능함을 알려드리며, 원인자는 준공요청시 교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항을 참조하여 요청하시기 바랍니다.

붙 임 : 교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	권세봉		도로보수과장	12/14 이규철
협조자	주무관	이상하
시행	도로보수과-12443	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8359	/전송	300-8364	/	se1212@seoul.go.kr	/	대시민공개