투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	공사기간 변경 계약 의뢰 (도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사)

우리 본부에서 시행 중인「도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사」와 관련하여, 아래와 같이 공사기간 변경계약을 의뢰(총차,1차)하오니 처리하여 주시기바랍니다.

가. 계 약 명 : 도시고속도로 연결램프(정릉길)설치 전기공사

나. 계약금액 : ****************************** (금액변경 없음)

다. 계 약 자 : ㈜성강통신기술사사무소 (대표자: 안치영)

라. 공사기간 변경 현황

구 분	계약금액(원)	공 사 기 간		비 고
		당 초	변 경
총 차	***********	’15.02.13.~’16.12.30.	’15.02.13.~’17.12.29.	364일 연장
1 차	**********	’15.02.13.~’16.12.30.	’15.02.13.~’17.02.28.	60일 연장

마. 변경사유

- 전체 사업기간 연장 및 선행공종의 공사 지연으로 전기공사 시기 미도래

붙  임 : 1. 공사기간 연장 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.   끝.

	설비부장
주무관	박기범		시책사업과장	임현근		설비부장	12/14 代유병기
협조자
시행	설비부-19572	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어 플레이스빌딩 15F	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02) 3708-8646	/전송	02) 3708-8659	/	kbpark@seoul.go.kr	/	부분공개(5)