투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	내부결재
(경유)
제 목	서울역사박물관 야주개홀(강당) 시설개선공사 설계변경 시행

시설과-6705호(2016.12.12.) 관련하여 야주개홀(강당)시설개선공사 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 서울역사박물관 야주개홀(강당) 시설개선 공사

2. 공사기간: 2016. 11. 22. ~ 12. 30.

3. 공사내용: 야주개홀 무대확장 및 프로세니움 이설 등 내부개선

4. 도 급 자: 주식회사 세명디자인어소시에이츠(대표 김민철)

5. 변경내용: 물량증감 및 정산

6. 변경사항
(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
도급금액	120,186,020	127,200,000	증)7,013,980
공사기간	2016. 11. 22. ~ 12. 30.		변경없음

7. 예산과목: 역사와 문화의 복합공간 창조, 관람 지원기반 구축, 박물관유지․운영, 시설비(401-01)

붙임: 1. 설계변경 시행 방침 1부.

2. 설계서

3. 변경내역서 1부

4. 설계변경 전후내역서 1부

5. 합의서 1부.  끝.

주무관	조은주		시설과장	12/14 오삼록
협조자	총무과장	사창훈
시행	시설과-6789	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55 서울역사박물관 경영지원부 시설과	/	www.museum.seoul.kr
전화	02-724-0123	/전송	02-724-0244	/		/	대시민공개