문서번호	정수과-5669
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
이병옥		하은경	12/14 임정규
협조

'16 사업장폐기물(무기성 정수오니)처리용역 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

'16년 사업장폐기물(무기성 정수오니)처리용역 설계변경 보고

사업장폐기물(무기성 정수오니)처리용역(장기계속계약) 차수별 물량 및 금액이 변경됨에 따라 설계를 변경하고자 함.

계약현황

건  명 : 암사사업장폐기물(무기성 정수오니)처리용역(장기계속계약)

도급자 : - 처리업체 : 한일시멘트(주)   대표 곽 의 영

- 운반업체 : 승기환경(주)     대표 곽 현 섭

총용역 계약기간 : 2016. 6. 01 - 2018. 05. 31(2년)

총용역 부기금액(운반비+처리비) : ￦1,333,376,000원

변경설계 내역

구 분		당 초	변 경	증, 감	비 고
총용역부기금액		1,333,376,000 (32,000톤)	1,333,376 (32,000톤)	변동없음
차수별	1차(2016)	500,016,000 (12,000톤)	694,438,880 (16,666톤)	증)194,422,880 증)4,666톤
	2차(2017)	625,020,000 (15,000톤)	430,597,120 (10,334톤)	감)194,422,880 감)4,666톤
	3차(2018)	208,340,000 (5,000톤)	208,340,000 (50,000톤)	변동없음

보고자 의견

2016년(1차) 12월 처리· 운반 용역비는 12월10일까지 처리한 물량에 한함

‘16.12.11~12.31에 처리한 물량은 ’17년 1월에 포함하여 지급함

2016년(1차) 계약물량 12,000톤보다 4,666톤 증가한 16,666톤을 처리하였기  차수별 물량 및 금액에 대해 설계변경 재무과 의뢰

붙임 : 합의서 및 변경 설계서 1부.  끝.