문서번호	도시철도토목부-15651
결재일자	2016.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		궤도과장	도시철도토목부장
성원배		최진규	12/14 김진팔
협 조
	주무관			최경호

「서울 지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구) 감독권한대행등 건설사업관리용역」

설계변경 검토 보고(1차 1회)

2016. 12.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구) 감독권한대행등 건설사업관리용역」

설계변경 검토 보고 (1차 1회)

『서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구) 감독권한대행등 건설사업관리용역』관련 건설사업관리기술자 배치계획 조정에 따른 설계변경 검토 보고임.

※ 도화(철도)-2016-A20-0633호(2016.12.08.) 계약금액 변경 요청 관련임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구) 감독권한대행등 건설사업관리용역

○ 구    간 : 송파구 잠실동(종합운동장)~송파구 방이동(월드컵공원 남4문)

○ 규    모 : 궤도부설 9.482km(단선, 콘크리트도상), 분기기 부설 11틀

○ 용역기간 : 2016.09.01. ~ 2017.01.31.

○ 계 약 액 : 903,500,000원

○ 계 약 자 : ㈜도화엔지니어링(60%), ㈜대건엔지니어링(40%)

구분	총차	1차	2차
용역기간	2016.09.01. ～2018.01.31.	2016.09.01. ～2016.12.31.	2017.01.01. ～2018.01.31.
용역금액(원)	903,500,000	194,330,000	709,170,000

□ 추진경위

○ ‘16.09.01. : 용역계약 및 착수

○ ‘16.09.26. : 궤도공사 착공

○ ‘16.11.01. : 건설사업관리기술자 추가 투입 2명(서원석, 남태섭)

○ ‘16.11.07.~ : 자재공급원 승인 및 공장검수, 현장확인 등

○ ‘16.11.25.~ : 중기반입, 자재투입(레일)

○ ‘16.12.12.   : 노반측량결과 인수 확인

건설사업관리기술자 추가 투입 1명(이나경)

○ ‘16.12.13.~ : 노반확인(공동 : 토목, 궤도) 측량 준비

□ 책임건설사업관리기술자 보고내용

○ 궤도공사 추진 공정에 따라 건설사업관리기술자 배치계획에 대한 조정이 필요하여 설계변경 요청

- 총차 계약금액 및 용역기간 변경 없음

- 건설사업관리기술자 배치 계획․조정 투입으로 차수별 용역비 조정

□ 검토사항

○ 궤도공사 공정에 맞게 건설사업관리기술자 적기 투입 필요

- 토목구조물 인수 작업, 자재 수급․검수 승인

- 궤도자재 등(레일, 지게차 등) 투입

- 레일용접 시편 제작 등 위험작업 점검․관리

○ 레일투입구 준비와 레일 반입 일정 조정에 따라 상주 분야별 건설사업관리 기술자 지연 투입

○ 건설사업관리기술자 배치계획 조정 변경 사항

- 건설사업관리기술자 배치 인원(총차, 1차, 2차)               (단위 : 인/월)

구분	총차		2016 (1차)		2017 (2차)		비고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경
책임 기술자(고급)	17.00	17.00	4.00	4.00	13.00	13.00
분야별 기술자(중급)	25.30	25.30	5.30	3.90	20.00	21.40
분야별 기술자(초급)	19.30	19.30	3.80	2.40	15.50	16.90
소 계	61.60	61.60	13.10	10.30	48.5	51.30
기술지원기술자 (궤도, 특급)	3.2	3.2	0.7	0.7	2.50	2.50
기술지원기술자 (안전, 고급)	2.7	2.7	0.6	0.6	2.10	2.10
소 계	5.9	5.9	1.30	1.30	4.60	4.60
합 계	67.5	67.5	14.40	11.60	53.10	55.90

□ 조치계획

○ 궤도공사 공정진행에 따라 책임건설사업관리기술자로부터 제출된 상기 설계변경 요청사항을 검토한 결과, 총차 계약금액․용역기간 변경없이 차수별 투입계획조정 및 설계변경함이 타당하다고 사료됨.

-  차수별 계약금액 및 용역기간 내용  ※ 총차 변경 없음

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
총차	계약금액	903,500	903,500	-
	용역기간	‘16.09.01. ~ ’18.01.31.		-
1차 (2016)	계약금액	194,000	160,000	34,330 감
	용역기간	‘16.09.01. ~ ’16.12.31.		-
2차 (2017)	계약금액	709,500	743,500	34,330 증
	용역기간	‘17.01.01.~‘18.01.31.

□ 향후계획

○ 건설사업관리기술자 배치계획 조정하여 변경계약 의뢰[본부→계약부서(재무과)]

붙임 : 1. 관련문서, 검토의견서 각 1 부.

2. 설계변경내역서 1 부.  끝.