투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	주식회사 이산 대표이사 귀하
(경유)
제목	과업 변경 지시(가산2빗물펌프장 유수지 복개용역)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리본부와 계약체결하여 진행중인「가산2빗물펌프장 유수지복개(차고지) 기본 및 실시설계용역」관련 남부도로사업소 장비보관소 부지변경에 따른 과업 변경을 다음과 같이 알려드리니 재설계 일정에 차질이 발생하지 않도록 하여 주시기 바라며,

3. 과업변경으로 인한 추가 용역비는‘17년 예산 반영후 변경할 예정이며, 용역 준공기간 연장에 따른 재계약 절차 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 가산2빗물펌프장 유수지복개(차고지) 기본 및 실시설계용역

나. 과업내용

구 분	당 초	변 경	비고
위 치	가산2빗물펌프장 유수지(금천구 가산동)	강남순환고속도로 선암영업소 하부(서초구 우면동)
규 모	유수지복개 차고지 3,000㎡, 체육시설 1,300㎡	면적6,142㎡, 장비보관소, 사무실, 창고
용역기간	2014.12.29.~2016.12.31.	2014.12.29.~2017.6.30.

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정호운		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	12/14 임춘근
협조자
시행	방재시설부-19846	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화		/전송		/		/	대시민공개