문서번호	도시철도토목부-15643
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
안태현		代김용선	12/14 김진팔
협 조
	주무관			김용선
	주무관			엄상민

『지하철9호선 3단계 923공구 폐기물처리용역』

계약변경(총괄4회, 6차1회) 검토 보고

2016. 12

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『지하철9호선 3단계 923공구 폐기물처리용역』

계약변경(총괄4회, 6차1회) 검토 보고

『지하철9호선 3단계 건설공사 폐기물 처리용역』과 관련 계약기간 및 계약금액 조정에 대해 검토 보고 드림. ※ ㈜동명기술공단 동명감 제2016-339호(‘16.12.06.)

1		용역 개요

○ 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사 폐기물처리용역

○ 용역금액 : 금516,000천원

○ 용역기간 : ‘10.08.05. ~ ‘16.12.31.

○ 계 약 자 : 고려개발(주)

○ 폐기물 준공 및 발주현황

(단위 : 천원)

구분	총괄	준공(1~5차)	6차	장래	비고
용역기간	‘10.08.05 ~’16.12.31	‘10.11.10 ~15.12.31	‘16.04.01 ~ 진행중	-
용역비	516,000	416,800	70,000	29,200

2		추진 경위

○ ‘16.11.14 : 업무연락전-도시기반시설본부-16-9788호

938변전소 수전선로 공사시 발생된 폐기물 처리지시

○ ‘15.11.18 : 도시철도토목부-14391호

지하철9호선 3단계 기본계획 변경 승인 알림

○ ‘16.12.06 : 폐기물 변경계약(총괄4회 및 6차1회) 요청

(감리단 → 도철토목부)

3		보고 내용

○ 폐기물량 변경사유

- 지하철 9호선 3단계 938변전소 수전선로 공사시 발생된 건설폐기물에 대하여 기 계약되어 진행중인 923공구 건설공사 폐기물 처리용역업체로 하여금 위탁처리 방침에 의거 반영

○ 계약금액 조정 반영

- 금회(총괄4회)변경시 938변전소 수전선로 공사시 발생 기 반출된 건설폐기물 수량에 한하여 실 처리물량 정산 반영

- 금회 반영 내역

・발생위치 : 938변전소 한전 수전선로 관로 굴착시 발생

・처리기간 : ‘16.10.28 ~ ‘16.11.28

・처리수량 : 268.85톤(116.891㎥)

・반영예산 : 4.2백만원

- 폐기물 증가물량 내역

공 종	당 초		변 경		증 감		비고
	수 량 (ton)	금 액(원)	수 량 (ton)	금 액(원)	수 량 (ton)	금 액(원)
폐콘크리트	7,230	115,094,370	7,230	115,094,370	-	0
폐아스콘	24,985	354,637,090	25,254	358,455,276	269	3,818,186
계	-	469,731,460	-	473,549,646	-	3,818,186
부가가치세	-	46,973,146	-	47,354,964	-	381,818
총용역 합계금액	-	516,704,606	-	520,904,610	-	4,200,004
적용		516,000,000		520,200,000	-	4,200,000

○ 총괄(4회) 용역기간 변경사유

- 지하철9호선3단계 기본계획변경 승인

(도시철도토목부-14391호, ‘16.11.18)

- 용역기간

・당 초 : ‘10.08.05 ~ ‘16.3.31

・변 경 : ‘10.08.05 ~ ‘18.12.31

○ 6차(1회) 용역기간 변경사유

- 938변전소 수전선로 공사시 발생 기 반출된 건설폐기물 수량반영(폐아스콘 268.85톤)

- 7차공사 변경시 도로복구 범위 조정에 따른 폐기물발생 시기 미도래로 계약기간 내에 처리할 수 있는 수량으로 변경

- 발주 및 수량변경 현황

구분	단위	발주수량	변경수량	비고
폐콘크리트	톤	1,277	1,277	-
폐아스콘	톤	3,052	740	감)2,312

- 공사비 조정

구분	당초	변경	증감	비고
도급비	70,000,000	33,900,000	감)36,100,000

※용역기간 변경없음

4		책임감리원 검토의견

○ 지하철9호선 3단계 기본계획 변경 승인 알림에 따른 계약기간 연장 및 938변전소 수전선로 공사시 발생된 건설폐기물을 반영한 변경내역(총괄4회)은 적정하며,

○ 7차공사 변경시 도로복구 범위 조정에 따른 페기물발생 시기 미도래로 계약기간 내에 처리할 수 있는 수량으로 조정 반영함(6차1회 변경)이 적정할 것으로 판단함.

5		조치 계획

○ 책임감리원 검토의견과 같이 9호선 기본계획 변경에 따른 총괄분 용역기간을 공사완료 예정인 ‘18.12.31까지 변경하고,

○ 6차용역에 대하여는 폐기물 발생시기 미도래에 따라 계약금액을 조정(감 36,100천원) 하고자 함.

붙 임 : 1. 책임감리원 검토의견 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.