문서번호	생태공원과-4005
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	생태공원과장	공원부장
김대호	최병언	전결 12/14 문길동
협 조	총무과장		박병현
	기획예산과장		김건태

여의도샛강 합류부 생태거점 조성사업 기본 및 실시설계용역

설계변경 및 준공기한 연장 검토

공  원  부

(생태공원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

여의도샛강 합류부 생태거점 조성사업 기본 및 실시설계용역

설계변경 및 준공기한 연장 검토

우리본부에서 추진 중인 ｢여의도샛강 합류부 생태거점 조성사업 기본 및 실시설계용역｣과 관련하여, 설계경제성 심사비용 반영에 따른 설계용역비 증액 변경 및 한강시민위원회 자문 검토, 하천점용허가 신청 등의 사유로 준공기한을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

용역개요

○  용 역 명 : 여의도샛강 합류부 생태거점 조성사업 기본 및 실시설계용역

○  위    치 : 여의도샛강 상류 합류부 주변 (약 190,000㎡)

○  설계내용 : 하안구조 개선, 수변식생 개선 및 수림대 조성, 편의시설 설치 등

○ 용역기간 : 2016. 5. 17 ~ 12. 22

○ 용 역 비 : 235,400천원

○ 용역기관 : 동부엔지니어링㈜, 유신㈜

용역비 변경현황

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감
용 역 비	235,400,000	250,400,000	증 15,000,000

주요 변경내용

○ 서울시 설계경제성 심사제도 개선방안에 따라 설계경제성(VE) 심사에       필요한 심사위원 비용(15,000천원) 반영 조치

※ 「서울시 설계경제성 심사제도 개선방안」 [계약심사과-10559호(2015.6.15.)와 관련임]

예산현황

(단위:원)

구 분	예산현액	예산(재)배정액	기원인행위액	집행잔액
예산내역	400,000,000	354,772,000	310,555,000	45,228,000

○ 증액분조치 : 용역비 증액분 15,000,000원은 예산 집행잔액

45,228,000원에서 사용

○ 예산과목 : 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 자연성 회복,

여의도 샛강 생태거점 조성, 시설비(100-401-01)

준공기한 연장

○ 용역기간 : 78일 연장

구 분	용 역 기 간	용역비(원)	비고
당 초	2016. 5. 17. ~ 12. 22.	235,400,000
변 경	2016. 5. 17. ~ 2017. 3. 10.	250,400,000

○ 연장사유

- 한강시민위원회 자문내용 등 면밀한 검토 반영에 따른 과업기간 연장이 필요한 실정이며 용역완료 후 하천점용허가 신청에 따른 협의기간 소요

귀책소재 및 지체상금 부과

○ 귀책소재 : 한강사업본부

○ 지체상금 : 미부과

검토의견

○ 상기와 같이 ‘여의도샛강 합류부 생태거점 조성사업 기본 및 실시설계용역’에 대해 설계변경 및 준공기한을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 설계변경내역서 및 준공기한 연기의뢰서 각1부. 끝.