투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	『 서울대공원 식물표본전시실 리모델링 전기공사』설계변경 시행

1. 시설과-8523호(2016.12.15.)와 관련입니다

2.『서울대공원 식물표본전시실 리모델링 전기공사』에 대하여 아래와 같이 설계 변경 코자 합니다

가. 공 사 명 : 서울대공원 식물표본전시실 리모델링 전기공사

나. 공사기간 : 2016.10.10. ~ 12. 25.

다. 계 약 자 : ****************

라. 준공정산 설계변경 내역

(단위 : 원)

변 경 전	변 경 후	비 고
115,653,860	115,653,860	- 산출내역서상 내역 변경 - 계약금액 금액변경없음

마. 설계변경 사유

• 제1.2 표본실 및 북카페 천정마감재를 석고보드에서 알루미늄 격자루버로

변경에 따른 전선관 배관자재 변경(조경과-5583,`16.11.03로 변경요청)

• 공사물량 증감 및 보험료 등 정산

붙임 : 1. 설계변경(정산) 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

	시설과장
전문관	황인공		주무관	代황인공		시설과장	12/15 공헌구
협조자	주무관	정한성
시행	시설과-8531	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7431	/전송	02-507-7230	/		/	부분공개(7)