문서번호	설비부-19706
결재일자	2016.12.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
김현숙	김영수	12/15 권오식

『시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 전기공사』

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.12

「시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 전기공사」

준공기한 연기 검토보고

「시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 전기공사」의 준공기한 연기를 위한 검토보고임.

사업개요

□ 사 업 명 : 시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 전기공사

□ 위    치 : 경기도 용인시 처인구 묵리 464번지 외 8필지

□ 공사규모 : 수변전설비(500KVA), 전력간선설비, 전등·전열설비, 태양광 발전 설비 등

관련근거

□ 일강 제16-155호(2016.12.09.) <공기연장 건>

변경내용

□ 준공기한 연기

구 분	도급사	계약금액	준공기한		비 고
			당초	변경
전기,전기소방	송주전기(주)	584,959,890원	2017.03.01.	2017.03.21.

□ 연기사유 : 선행공정(건축)이 연기되어 전기공사도 연기하려고 함.

검토내용

□ 준공기한 연기에 관한 감리단의 검토의견이 적합한 것으로 판단되어 재무국에            변경계약을 요청할 예정입니다.

붙임 : 1. 합의서 1부.

2. 감리사 공문 1부.  끝.