문서번호	시설관리과-35364
결재일자	2016.12.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
구본천		강동철	12/15 代고신석
협조

보고서(급수공사 취소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  12.

명에 의거 『2015년 영등포구 관내상수도공사(장기계속단가)』공사 시행중 감리 현장실정보고서가 제출되어 아래와 같이 보고합니다.

2016. 12.

보고자 : 지방시설주사보 구본천

현  황

위   치 : 영등포구 대림동760-1~760-11(개량145)

공사개요 : D=150㎜, L=115m

작업기간 : 2016.11.18 ~ 12.18

보고내용

2015년 영등포구 관내상수도공사(장기계속단가) 하송이엔씨(주) 이현구로부터

동절기 굴착통제로 인한 급수공사연기원이 접수(2017.03.31까지연기요청)

㈜이준엔지니어링 현장실정보고서 검토의견에 굴착통제로 인한 공사시행이

불가하므로 공사연기 또는 취소하여 재작업지시 의견 통보

조치 의견

공사연기는 공사기간이 너무길어 공사취소하고 2017년에 다시 작업지시하여 처리코자합니다.

첨  부 :  공사연기원 및 현장실정보고서 각1부.  끝.