문서번호	설비부-19633
결재일자	2016.12.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	건축설비과장	설비부장
이호완	김영수	12/15 권오식

『시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 기계설비공사』

설계변경(2차) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

『시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 기계설비공사』

설계변경(2차) 검토 보고

『시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 기계설비공사』관련 건설사업관리단이 요청한 설계변경(2차)에 대한 검토 보고임.

관련근거

□ 건설사업관리단 기계설비 설계변경 요청(용영설-04호, 2016.12.14.)

공사개요

□ 위    치 : 경기 용인시 처인구 이동면 묵리 464

□ 공사규모

- 연면적 : 14,475㎡(지하1, 지상4)

- 주설비 : 냉난방, 급수급탕, 위생설비, 소방설비, 자동제어설비 등

□ 공사기간 : 2016.02.22. ~2017.03.21

□ 도 급 비 : 금576,892천원

□ 시 공 사 : 주)삼양이엔씨 대표 유금재

□ 감 리 사 : 주)영지영섭종합건축사사무소 대표 황영섭

설계변경 사항

□ 계약금액 변경

(단위 : 원)

구 분	계 약 금 액			비 고
	당 초	변 경	증·감
공급가액	524,447,274	564,365,228	39,917,954
부 가 세	52,444,726	56,436,522	3,991,796
도 급 비	576,892,000	620,801,750	43,909,750

□ 설계변경 사유

- 사용자 요구사항 및 현장여건 반영으로 설계물량 증․감.

□ 설계변경 내용

- 증축 및 리모델링구간 위생, 난방배관 및 소화설비공사 물량 변동 및 사용자의 요구사항 반영으로 43,909천원 증액.

준공기한

- 당 초 : 2016.02.22. ~2017.03.21.

- 변 경 : 2016.02.22. ~2017.03.21.

□ 준공기한 : 변동없음.

보고자 검토의견

□ 감리검토 의견과 같이 현장여건 반영 및 사용자(영보정신요양원장)의 요구사항을 예산범위내 최대한 반영함이 타당함.

□ 설계변경(2차)에 대하여 계약부서(본청 재무과)에 의뢰코자 함.

붙 임 :  1. 감리검토(실정)보고 - 1부.

2. 합의서 및 설계변경 내역서 – 각1부.  끝.