문서번호	급수운영과-28031
보존기간	년
결재일자	2016.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	급수운영과장
김종필토		이승완	12/15 代이승완
협 조
	주무관			이한수
	주무관			박상권
	주무관			남상욱
	주무관			강대유

설계변경 심의결과 보고

(중계역~노원구민회관간 송배수관 정비공사)

2016. 12.

북부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의결과 보고

우리 사업소에서 시설관리공단에 위탁 감독중인 『중계역~노원구민회관간 송배수관 정비공사』 에 대한 신공종 및 시공물량 증․감으로 인한 설계변경 사유가 발생됨에 따라 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최하고 그 결과를 보고드림.

1. 공사 개요

가. 공 사 명 : 중계역~노원구민회관간 송배수관 정비공사

나. 공사개요

․ 당초 : D = 600mm, L = 1,367m

․ 변경 : D = 600mm, L = 1,360m

다. 공사기간 : 2016. 5. 10 ~ 2016. 12. 28

라. 도 급 비 :                                                    (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ㆍ 감
총 부기금액 (계약금액)	730,959,520	692,350,000	감) 38,609,520

마. 도 급 자 : (주)치산치수  대표 박흥자

2. 심의 개최

가. 심의일정 : 2016. 12. 14.(수)  17:00

나. 심의장소 : 북부수도사업소 급수운영과

다. 심의위원장 : 급수운영과장

라. 심의위원 : 시설7급 강대유, 시설7급 남상욱, 시설7급 박상권, 시설7급 이한수

3. 심의 내용

가. 물량변동의 적정성 여부

나. 계약 변동(증․감) 물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부

다. 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4. 심의 결과(별첨)

가. 설계변경의 타당성 : 타당함

나. 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정함

다. 계약변동(증, 감)물량 계약단가 낙찰율 적정 적용 여부 : 적정함

라. 각종 제반 규정 준수여부 : 준수함

마. 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 적정함

5. 조치 의견

위와 같이 설계변경 내역을 심의한 결과 설계변경이 타당하고 검토항목이 적정하여 본 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 변경계약을 의뢰코자 합니다.

첨 부 : 1. 설계변경 검토 의견서 및 심의 결정서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계변경사유서 1부.  끝.