등록번호	도로시설과-18408		도로굴착팀장		도로시설과장		안전건설국장
등록일자	2016.12.14.
			황인수		이동훈		12/15 이우룡
결재일자	2016.12.15.
공개구분	대시민공개
			협조
『2016년 도로굴착복구공사(연간단가)』 설계변경(3차:최종) 검토 보고
안전건설국 도로시설과

『2016년 도로굴착복구공사(연간단가)』

설계변경(3차:최종) 검토 보고

『2016년 도로굴착복구공사(연간단가)』 관련하여 실공사 시행에

따라 시공물량 증·감이 발생하여 이에 따른 설계변경 검토

보고임.

Ⅰ		공사 현황

□ 공 사 명 : 2016년 도로굴착복구공사(연간단가)

□ 공사기간 : 2016. 03. 11 ~ 2016. 12. 31

□ 공사개요 : 아스팔트포장 157@, 보도블럭 및 판석 포장 18.94@,

□ 계약금액 : 456,685천원

□ 계약업체 : ㈜백두이엔지 대표 김재기

□ 설계변경 사유 : 실공사 시행에 따른 공종 및 물량 변경 등 사항 반영

- 예상물량 증감, 관급자재 시공물량 증감 변경 반영

□ 주요 변경내용

공 종	단위	당초	변경	증 ․ 감	비고
아스팔트 포장(표층)	@	156	157.07	증)1.07
보도블럭 포장	@	1	16.34	증)15.34
화강판석 포장	@	1	2.6	증)1.6
아스팔트 컷팅	m	600	294	감)306
도로경계석	m	30	13	감)17
차선도색	㎡	720	1,123	증)403

□ 공사비 현황                                            (단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감액		비 고
			증	감
총공사비	816,685,860	920,524,000	103,838,140
도 급 비	456,685,860	542,270,000	85,584,140
관 급 비	252,000,000	256,715,000	4,715,000
폐기물처리비	108,000,000	121,539,000	13,539,000

□ 조치 의견

○ 위와 같은 내용으로 사업 시행에 따른 신규 공종 발생 및 공종별 물량 증․감 사항에 대한 설계변경(최종)을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.  끝.