문서번호	도로보수과-12529
결재일자	2016.12.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권순회		이규철	12/15 한동근
협조
	주무관		이상하

2016년도로굴착복구공사폐아스콘처리용역 설계변경(제2회) 최종 검토보고

2016. 12.

서부도로사업소

[도로보수과]

2016년 도로굴착복구공사 폐아스콘 처리용역

설계변경(제2회) 검토보고

우리사업소에서 시행중인 「2016년 도로굴착복구공사(연간단가)」와 관련하여 추가 예산 재배정, 도로함몰 원인조사에 따른 신공정(폐아스콘 처리비용) 추가, 시공물량 증·감, 발생에 대하여 설계변경 사항을 검토하고 그결과를 보고드림.

공사개요

◦ 용 역 명 : 2016년 도로굴착복구공사 폐아스콘 처리용역-서부

◦ 도 급 사 : 태성기초산업(주)외 1 대표 윤영춘

◦ 계약기간 : 2016. 03. 30 ~ 2016. 12. 31

◦ 계약금액 : 금58,121,000원(금오천팔백일십이만일천원)

설계변경사유 및 현황

◦ 신규일위대가 반영

- 도로관리과에서 시행하는 「노면하부 동공탐사용역」 과 관련하여 아스팔트 노면굴착시 폐아스콘 덩어리가 발생되어 이를 처리하는 비용이 발생

- 근거 : 도로관리과-3770호(2016. 3. 7) “동공 굴착조사 요청”

- 신규일위대가 : 폐아스콘 처리비 (3개사 견적 평균가 산정하여 적용)

ㆍ평균가격 10,833원/ton  ㆍ적용(낙찰율적용) 9,511원/ton

◦ 시공물량 증ㆍ감

- 도로굴착기관의 관리청 복구 의뢰량 증가에 따른 폐기물수량 증가

- 추가예산 확보 : 도로관리과-19546호(2016. 12. 5) “2016년 도로굴착복구기금

재배정 및 감배정 통보(3차)“ [배정액 : 1,200,000천원]

◦ 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감
공급가액	52,837,273	106,050,000	증) 53,212,727원
부가가치세	5,283,727	10,605,000	증) 5,321,273원
도급비	58,121,000	116,655,000	증) 58,534,000원

◦ 주요변경 수량

공 종	단위	수 량			비고
		당 초	변 경	증 · 감
폐아스콘 운반	ton	6,075	10,512	증) 4,437	평삭재
폐아스콘 처리	ton	0	783	증) 783	덩어리

◦ 예산과목

구 분	연도별	예 산 과 목	배 정 액	비고
도로굴착복구	2016년	도로관리과,도로시설물관리,도로굴착복구,도로굴착복구공사,시설비	81,655천원
도로굴착복구시행도로	2016년	도로관리과,도로시설물관리,도로굴착복구,도로굴착복구공사,시설비	35,000천원
계			116,655천원

조치계획

◦ 상기와 같이 설계변경(12월 기준) 및 변경계약 시행코자 함.

별첨 : 1) 설계변경 내역서(제2회) 1부.

2) 관련공문 2부.   끝.