함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(2016 강북정수센터 취.정수장 조경관리 용역)

1. 우리 정수센터에서 시행중인 「2016 강북정수센터 취.정수장 조경관리 용역)에 대하여 설계변경하고 아래와 같이 변경계약을 의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 2016 강북정수센터 취.정수장 조경관리 용역

나. 공사기간 : 2016. 04. 20. ～ 2016. 12. 15.

다. 도 급 자 : 청보공영(주) 대표 홍 승 대

라. 계약금액 : 금149,226,100원

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
합 계		149,226,100원	146,226,000원	(감)3,000,100원
도급비	계	149,226,100원	146,226,000원	(감)3,000,100원
	공급가액	135,660,091원	132,932,727원	(감)2,727,364원
	부가세	13,566,009원	13,293,273원	(감)272,736원

마. 계약금액 변경 내역

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

따로붙임 1. 설계변경 시행 방침서  1부.

2. 설계변경 심의위원회 개최결과 보고서 1부.

3. 합의서               1부.

4. 설계변경내역         1부.

5. 제비율검정표         1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
행정관리과장	김형규		주무관	하수용		강북아리수정수센터소장	12/15 박기석
협조자
시행	행정관리과-14679	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동) 강북아리수정수센터 행정관리과	/
전화	3146-5810	/전송	3146-5807	/	kimhg1004@seoul.go.kr	/	대시민공개