투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	기성금 지급요청(제1차2회)[9호선 3단계 1구간 송변전공사]

1. 서지9-3 시감 제16-432(2016.12.13.)호와 관련 입니다.

2.「서울지하철 9호선 연장건설 3단계 1구간 송변전공사(1차)」추진과 관련,시공사로부터 제1차 2회 기성금 신청이 있어 감리단으로부터 기성검사를 완료하고, 관련서류를 송부하오니 본 공사의 계약자에게 기성금이 지급될 수 있도록 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철 9호선 연장건설 3단계 1구간 송변전공사 (1차)

나. 공사기간 : 2015. 08. 11 ~ 2017. 03. 31

다. 계약금액 : ￦1,000,000,000원

라. 계 약 자 : 거성일렉콤(주) 박성래  외 1인

마. 검 사 일 : 2016. 12. 12.

바. 지급내역(1차 2회)

[단위: 원]

구 분		계 상 금 액			비고
		합계	거성일렉콤(주)	동일전력(주)
계 약 금 액		1,000,000,000	510,000,000	490,000,000
선금급 금액		500,000,000	255,000,000	245,000,000
기성 내역	누계금액	915,000,000	510,000,000	405,000,000
	(1회)	321,000,000	235,000,000	86,000,000
	금회(2회)	594,000,000	275,000,000	319,000,000
선금정산	누계금액	500,000,000	255,000,000	245,000,000
	(1회)	160,500,000	117,500,000	43,000,000	기 정산
	금회(2회)	339,500,000	137,500,000	202,000,000	금회
실지급액	누계금액	415,000,000	255,000,000	160,000,000
	(1회)	160,500,000	117,500,000	43,000,000	기 지급
	금회(2회)	254,500,000	137,500,000	117,000,000	금회
기성 잔액		85,000,000	0	85,000,000

사. 선금지급 : ￦500,000,000원(정산완료(금회공제 339,500,000원))

아. 지출금액 : ￦254,500,000원(거성:137,500,000원, 동일:117,000,000원)

자. 예산과목

도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도 9호선 3단계 건설, 시설비 및 부대비 (시설비)

따로붙임 : 1. 기성검사 (제1차2회) 결과보고 1부. 끝

	도시철도설비부장
주무관	이재영		송변전과장	박동규		도시철도설비부장	12/15 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-13898	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7271	/전송	02-772-7308	/	lolee@seoul.go.kr	/	대시민공개