문서번호	기전과-10243
결재일자	2016.12.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
신대중		12/16 박심근
협 조
	주무관		이명호

『2016년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사』

홍파초교 외 1개소 실정보고 검토보고

2016. 12.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2016년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사』

홍파초교 외 1개소 실정보고 검토보고

2016년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사(홍파초교 외 1개소)의 실정보고가 접수되어 검토하여 보고드림.

Ⅰ

관 련 근 거

○ 계약번호 : 20161*******00(2016.10.24.)

○ ㈜트래픽스 TR-개선-1234호(2016.12.15.)

Ⅱ

공 사 개 요

○ 공 사 명 : 2016년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사(홍파초교 외 1개소)

○ 계약자 : ㈜일신기전 대표 김쌍용

○ 계약금액 : *******************************

○ 공사기간 : 2016. 10. 24. ∼ 2016. 12. 30.

○ 감 리 원 : 책임감리원 장지용

Ⅲ

실정보고 현황

○ 보고내용                                                    (단위 : 원)

구 분	당 초	변경후	비 고
홍파초교 외 1개소	***********	***********	지주 현장 여건에 맞게 교체 구민센터앞 교차로 음향신호기 신설 경비 정산

****************

Ⅳ

검 토 결 과

○ 2016년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사의 실정보고를 검토한 결과 공정의 변경사유가 타당하여 승인하고 이후 설계변경에 반영하고자 합니다.

첨  부 : 2016년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사 실정보고 1부. 끝.