투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	설계변경(제3차) 시행(2016년 교통신호기 신설 및 보수공사<제2지역-연간단가>)

우리사업소(기전과)에서 시행 중인 『2016년 교통신호기 신설 및 보수공사(제2지역-연간단가)』와 관련하여 아래와 같이 설계변경을 시행하여 사업완수에 만전을 기하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2016년 교통신호기 신설 및 보수공사(제2지역-연간단가)

2. 계약금액 : 금776,013,000원(금칠억칠천육백일만삼천원)

3. 계약업체 : ㈜청호파워텍 대 표 이 순 형

4. 계약기간 : 2016. 03. 15. ~ 12. 31.

5. 설계변경내역

가. 설계변경금액

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증/감
도급비	공 급 가 액	705,466,364	724,600,000	증 19,133,636
	부가가치세	70,546,636	72,460,000	증 1,913,364
	계	776,013,000	797,060,000	증 21,047,000

나. 설계변경 사유 : 시공물량 증가 및 제경비 정산

6. 예산과목 : 도로교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리

교통신호기 신설 및 보수, 시설비

붙   임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 원가검증 1부.

4. 방침서 1부. 끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),관리단속과장
주무관	전상은		주무관	김용문		기전과장	12/16 유재옥
협조자	주무관	노미경		계약1팀장	조현
시행	기전과-6686	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	02-3284-5433	/전송	02)3284-5470	/		/	부분공개(6)