문서번호	기전과-10263
결재일자	2016.12.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
신대중		박심근	12/16 代박영종
협조
	주무관		이명호

『2016년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사』

낙찰차액 사용계획 보고

2016. 12.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2016년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사』

낙찰차액 사용계획 보고

횡단보도 확충정비 교통신호기공사 시행중 증액사유가 발생하여 낙찰차액을 활용하여 아래와 같이 시행코자 보고드림.

Ⅰ

공 사 개 요

공 사 명	2016년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사(홍파초교 외 1개소)
도 급 자	㈜일신기전 대표 김쌍용
도 급 비	금104,258,170원
공 사 기 간	2016. 10. 24. ∼ 2016. 12. 30.
감 리 원	㈜트래픽스 책임감리원 장지용

Ⅱ

낙찰차액 현황

(단위 : 원)

발주금액	계약금액	낙찰차액	비 고
***********	***********	**********

Ⅲ

감리실정보고사항

○ 홍파초교후문

- 현장실정에 맞게 지주 교체(∅150㎜ → ∅200㎜)

- 2차선 도로에 맞게 지주 및 부착대 교체(∅250㎜ → ∅200㎜, 9m → 7m)

- 지주하부 지장물로 인하여 부착대 길이 조정(5m → 3m)

○ 나정순쭈꾸미

- 제기동 구민센터 앞 교차로 음향신호기 설치(8대)

- 토목공사에 의해 부착대 길이 조정(5m → 7m, 5m → 6m)

- 가공지주 변경 및 선로변경(∅200㎜ → ∅150㎜)

○ 보험료정산 : 일용직근로지 미채용으로 보험료정산

○ 변경금액 : ************

Ⅲ

낙찰차액 사용계획

○ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 보행불편해소를위한 횡단보도 확충정비사업, 시설비(401-01)

○ 『2016년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사(홍파초교 외 1개소)』의 낙찰차액을 활용하여 최종설계변경을 시행코자 합니다.

첨  부 : 2016년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사 실정보고 1부. 끝.