투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	2016년 도로굴착복구공사 폐아스콘 처리용역(2회) 최종 설계변경 시행

우리사업소에서 시행중인 『2016년 도로굴착복구공사 폐아스콘 처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다

가. 용 역 명 : 2016년 도로굴착복구공사 폐아스콘 처리용역

나. 용역기간 : 2016. 03. 30 ~ 2016. 12. 31.

다. 총용역비 : 금58,121,000원(도급비)

라. 도 급 자 : 태성기초산업(주) 대표 윤영춘

마. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
공급가액	52,837,273	106,050,000	증) 53,212,727
부가가치세	5,283,727	10,605,000	증) 5,321,273
도 급 비	58,121,000	116,655,000	증) 58,534,000

바. 설계변경 사유

◦ 신공정 추가 및 도로굴착복구 관리기관의 폐기물 처리물량 증·감에 따른 변경

사. 예산과목

구 분	예 산 과 목	예 산 액	비고
도로굴착복구	도로관리과,도로시설물관리,도로굴착복구,도로굴착복구공사,시설비	81,655천원
도로굴착복구 시행도로 정비	도로관리과,도로시설물관리,도로굴착복구,도로굴착복구공사,시설비	35,000천원
계		116,655천원

첨부 1) 설계변경 내역서 1부.

2) 합의각서 1부.

3) 관련 보고서 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	권순회		도로보수과장	이규철		서부도로사업소장	12/16 한동근
협조자	주무관	이상하		주무관	윤미란		관리단속과장	박종윤
시행	도로보수과-12550	(		)	접수		(		)
우		서울시 마포구 가양대로 208 서부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)300-8352	/전송	02)300-8364	/	plpel@seoul.go.kr	/	부분공개(7)