문서번호	정수과-14316
결재일자	2016.12.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김선례		代김경진	12/16 이성락
협 조
	주무관			박소현

차수별 물량조정에 따른

『사업장폐기물 처리용역』 변경계약 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

『사업장폐기물(정수슬러지) 처리용역』 변경계약

『사업장폐기물 처리용역(단가계약)』과 관련, 차수별 물량 변동에 따른 변경계약을 하고자 합니다.

□ 용역계약 현황

○ 계 약 명 : 영등포아리수정수센터 사업장폐기물(무기성 정수슬러지) 처리용역(장기계속단가계약)

○ 용역기간 : 2016. 6. 16 ~ 2018. 6. 15.

○ 계약상대 : 처리자[유창테크(대표 오인석), ㈜신세계자원(대표 김장성)]

운반자[진도산업(대표 현진옥), ㈜우림플러스원(대표 김미경)]

○ 계약단가 : 34,049.4원/톤(처리 22,539원/톤, 운반 11,510.4원/톤)

○ 계약금액(1차년도) : 금279,205,080원(총부기금액:금953,383,200원)

구 분	합계	2016년(1차) (6.16~12.31)	2017년(2차) (1.1~12.31)	2018년(3차) (1.1~6.15)	비고
처리물량	28,000톤	8,200톤	14,000톤	5,800톤
금 액(원)	953,383,200원	279,205,080원	476,691,600원	197,486,520원

□ 변경계약 사항

○ 2016년 사업장폐기물 처리현황

- 처리기간 : 2016. 6. 16 ~ 12. 13

- 처리물량 : 6,060톤(1차수 계약물량 대비 2,140톤 감소)

- 처리금액 : 금206,237,120원(1차수 계약금액 대비 72,967,960원 감소)

○ 변경계약 내용

- 차수별 물량 조정 : 1차년도 잔여분 2,140톤을 2차년도로 이월

- 물량조정에 따른 차수별 금액조정

- 처리량의 소숫점이하 절사에 따른 총부기금액 변경

- 계약기간, 처리단가, 총물량은 변경 없음

○ 세부 변경내역

- 물량조정에 따른 차수별 금액조정

구 분		당 초(원)	변 경(원)	증, 감	비 고
총계약부기금액(원)		953,383,200	953,280,940	△102,260
차수별	1차(2016)	279,205,080	206,237,120	감 72,967,960
	2차(2017)	476,691,600	549,557,300	증 72,865,700
	3차(2018)	197,486,520	197,486,520	0	변경 없음

- 차수별 물량조정

구 분		당 초 (톤)	변 경 (톤)	증, 감	비 고
총용역물량(톤)		28,000	28,000	0	변경 없음
차수별	1차(2016)	8,200	6,060	감 2,140
	2차(2017)	14,000	16,140	증 2,140
	3차(2018)	5,800	5,800	0	변경 없음

□ 보고자 의견

○ ‘16년 회계연도 종료에 따른 계약 및 지출업무 마감으로 인하여 11월 처리량 및 12월 처리물량중 12월 13일까지 처리분에 대하여 청구에 의거 12월 29일까지 정산 지급하고, 12월 14일~12월 31일까지의 처리물량은 ’17년도 1월분 처리비에 포함하여 정산·지급하고자 함.

○ 1차, 2차년도 처리물량 변동에 따라 설계변경하고, 재무과로 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 합의서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.