함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「뚝도정수센터 농축조공사 건설사업관리 용역」 설계 변경(제 1회) 시행

1. 우리 본부에서 시행중인 『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 건설사업관리 용역』에 대하여 아래와 같이 설계 변경(제 1회)을 시행코자 합니다.

가. 용역 현황

1) 용 역 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 건설사업관리 용역

2) 용역개요 : 뚝도정수센터 농축조공사 토목, 기계, 전기 및 통신공사 책임감리

3) 공사기간 : 2016. 03. 08. ~ 2016. 12. 31.

4) 도급금액 : 431,420천원

5) 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비(감리비)

6) 계 약 자 : ㈜한국종합기술 외 1개사

나. 변경 내용

1) 계약금액 변경

○ 변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
공급가액	392,200,000	511,000,000	증	118,800,000
부가가치세	39,220,000	51,100,000	증	11,880,000
도급공사비	431,420,000	562,100,000	증	130,680,000

○ 변경 사유 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계) 공사기간 연장에 따른                    건설사업관리 용역기간 연장 및 기술자 투입계획 변경에 따른 계약금액 변경

2) 용역기한 연장

○ 용역연장 기한

- 당초 : 2016. 03. 08. ~ 2016. 12. 31.

- 변경 : 2016. 03. 08. ~ 2017. 07. 14.(195일 연장)

※ 동절기 공사중지 기간(59일)에는 토목기술자(1인)만 0.5개월 간헐적 투입

○ 연장사유 귀책 소재 : 업체에 책임 없음

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 용역기한 연장 사유 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계) 공사기간                   연장에 따른 건설사업관리 용역기한 연장

붙 임 : 1. 용역기한 연장 및 계약금액 변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 합의서 1부. 끝.

주무관	신왕근		생산관리과장	한희선		생산부장	구자훈		경영관리부장	12/16 정진일
협조자	주무관	이경선		주무관	김성민		재무회계과장	박병식
시행	생산관리과-17462	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1317	/전송	02-3146-1319	/	swgking@seoul.go.kr	/	대시민공개