문서번호	도로보수과-12587
결재일자	2016.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		12/16 이규철
협 조
	주무관		이상하

2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제23차)

2016.  12. 16.(금)

서부도로사업소

(도로보수과)

2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제23차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2016. 02. 19. ~ 2016. 12. 31.

○ 시 공 사 : 미성건설(주) 대표 김지성

○ 도 급 비 : 706,716,000원

□ 작업완료 보고

○ 건    명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제23차)

○ 작업위치 : 마포구 연희로 39 외 40개소

○ 작업기간 : 2016. 10. 25. ~ 2016. 12. 10.

○ 공사금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	150,087천원	128,464천원	감) 21,623천원
관급자재	102,781천원	83,730천원	감) 19,051천원

○ 작업내역

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
1	마포구 연희로 39	24m	24m	-
2	서대문구 남가좌동 224-33	24m	0m	감) 24m	위치변경으로 좌회전감응 보류
3	은평구 구산동 산131-18	24m	0m	감) 24m	위치변경으로 좌회전감응 보류
4	은평구 통일로 655(녹번부동산) 옆	52m	0m	감) 52m	기 작업완료되어 작업 취소

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
5	은평구 통일로625(애견미용학원) 옆	43m	0m	감) 43m	기 작업완료되어 작업 취소
6	은평구 응암로322(아이꿈터 서부점) 옆	24m	0m	감) 24m	기 작업완료되어 작업 취소
7	은평구 응암로318(응암 금호아파트) 옆	86m	0m	감) 86m	기 작업완료되어 작업 취소
8	은평구 응암로301-1 (CU 응암서부점) 옆	54m	0m	감) 54m	기 작업완료되어 작업 취소
9	은평구 응암로266(응암앵글천막) 옆	55m	0m	감) 55m	기 작업완료되어 작업 취소
10	은평구 응암로264(서울효요양병원) 옆	52m	0m	감) 52m	기 작업완료되어 작업 취소
11	서대문구 홍연교 북측	664m	577m	감) 87m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
12	한강대로 문배동 24-5 용산등기소 앞	1,030m	1,011m	감) 19m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
13	중구 장충단로 동대문역~장충체육관 앞	7,697m	7,249m	감) 448m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
14	마포구 망원역 1번출구 앞	96m	96m	-
15	마포구 성산로 124 맞은편 성서중학교	92m	75m	감) 17m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
16	마포구 성암로 DMC첨단산업센터~중동교	13,784m	639m	감)13,415m	2017년 포장계획으로 작업취소
17	마포구 성산로 성산대교 북단~마포구청역	5,316m	5,105m	감) 211m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
18	마포구 월드컵북로 경성고입구~홍대입구역	3,572m	3,338m	감) 234m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
19	용산구 원효로 원효로4가 풍전아파트 앞	3,080m	3,193m	증) 113m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
20	용산구 녹사평대로 녹사평역~한강중학교 앞	11,204m	10,728m	감) 476m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
21	용산구 서빙고로 서빙고동주민센터, 한남역	3,948m	3,755m	감) 193m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
22	용산구 독서당로 한남오거리~성동구 경계	5,885m	6,103m	증) 218m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
23	중구 다산로 버티고개역 주변	3,133m	2,655m	감) 478m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
24	중구 퇴계로 회현사거리~퇴계로 지하차도	3,555m	2,985m	감) 570m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
25	중구 통일로 호암아트홀 앞	2,488m	2,036m	감) 452m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
26	서대문구 연희로 연남동사거리~연희삼거리	7,835m	7,035m	감) 800m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
27	은평구 가좌로 새절역~응암오거리	3,145m	3,155m	증) 10m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
28	은평구 가양대로 수색교	994m	632m	감) 362m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
29	용산구 한강대교북단 교차로(상행)	112m	356m	증) 244m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
30	서대문구 홍은동 402-39번지	48m	31m	감) 17m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
31	서대문구 증가로 202, 169 앞	454m	354m	감) 100m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
32	마포구 토정로 299 M펠리스웨딩R	96m	96m	-
33	은평구 연서로 363 ~ 은평뉴타운 408동 앞	264m	264m	-
34	용산구 녹사평역 앞 이태원지하차도 옆	130m	122m	감) 8m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
35	서대문구 응암로 151 은현교회 앞 교차로	30m	30m	-
36	중구 수표로 66 앞(을지로3가역~광명빌딩)	72m	0m	감) 72m	포장공사 후 도색되어 있음
37	중구 퇴계로 116 옆(남강자원 흥국빌딩)	45m	0m	감) 45m	포장공사 후 도색되어 있음
38	은평구 은평구 통일로 산골고개 앞 외 2개소	24m	13m	감) 11m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
39	서대문구 세검정로 홍은사거리~상명대 앞	13,442m	13,127m	감) 315m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
40	서대문구 증가로 193 앞 어린이보호구역	261m	70m	감) 191m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
41	서대문구 성산로 세브란스병원 주차장 입구	204m	0m	감) 204m	기 작업완료되어 작업 취소
42	마포구 신촌로 174 이대교차로	0m	784m	증) 784m	이전 차수 보류되어 재 작업완료
43	용산구 이촌로 한강고수부지 진입로	0m	48m	증) 48m	이전 차수 보류되어 재 작업완료
44	마포구 함정동 합정역교차로(홍대방향)	0m	57m	증) 57m	이전 차수 보류되어 재 작업완료
45	용산구 원효로 삼성테마트앞 교차로	0m	256m	증) 256m	이전 차수 보류되어 재 작업완료
46	마포구 동교로 158	0m	479m	증) 479m	이전 차수 보류되어 재 작업완료
47	용산구 독서당로 유엔빌리지 입구	0m	24m	증) 24m	이전 차수 보류되어 재 작업완료
	합 계	93,138m	76,502m	감)16,636m

○ 변경사유

- 실 작업량 변동에 따른 물량차이 : 23개소

- 기 작업완료되어 작업 취소      :  8개소

- 이전 차수 보류되어 재 작업완료 :  6개소

- 위치변경으로 좌회전감응 보류   :  2개소

- 포장공사 후 도색되어 있음      :  2개소

- 2017년 포장계획으로 작업취소 :  1개소

□ 향후계획

○ 상기 보고내용과 같이 실제 작업완료분 내에서 준공 처리.

○ 위치변경으로 좌회전감응 보류된 건은 2017년에 작업예정.

붙 임 : 1. 제23차 작업완료 내역서 1부.

2. 제23차 작업완료 사진대지 1부.

3. 제23차 작업완료 도면 35부(별도첨부).  끝.