문서번호	방재시설부-20019
결재일자	2016.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
송영배		代이병환	12/16 임춘근
협조
	경리과장		최정수

잠원2 빗물펌프장 신설공사외 1개소 전면책임감리용역

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고(총차, 3차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

잠원2 빗물펌프장 신설공사외 1개소 전면책임감리용역

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고(총차, 3차)

「잠원2빗물펌프장 신설공사」건설사업관리기술자 투입계획 변경 및 사업기간 연장에 따른 잠원2빗물펌프장 신설공사외 1개소 전면책임감리용역(총차, 3차) 설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 잠원2감 2016-275(2016.12.16.) : 건설사업관리용역 설계변경(총차3회, 3차1회) 및 용역기간 연장보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 잠원2 빗물펌프장 신설공사외 1개소 전면책임감리용역

○ 총용역비 및 용역기간                                 (단위 : 천원)

구 분	총 차 분	1차분(준공)	2차분(준공)	3차분(금회)
총용역비	1,224,800	844,800	80,000	300,000
용역기간	`13.04.01.~ `16.12.31.	`13.04.01.~ `14.12.31.	`15.01.01.~ `15.11.19.	`15.11.20.~ `16.12.31.

○ 감 리 사 : ㈜신명건설기술공사외 2개사

□ 보고내용

[설계변경]

○ `16년 수방대비 자연방류 관로부설을 위한 야간전담 건설사업관리   기술자 배치 반영

- 보조감리(토목) : 2016.4.7. ~ 2016.7.6.

○ 시설공사 추진 공정에 따른 건설사업관리기술자 추가 투입 반영

- 책임감리원(3개월), 보조감리원(토목 6.5개월, 기계 2.5개월, 전기 2개월)

○「강남역 주변 역경사 관로 개선공사」병행 시공에 따른 건설사업관리기술자 배치

- 보조감리(토목) : 2016.11.7. ~ 2017.7.31.

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정(ESC)

- 물가변동 조정금액 : 19,497천원(조정기준일2016.1.1. 품목조정율7.91%)

○ 설계변경내역

구 분	당 초(천원)	변 경(천원)	비고(증·감)
용역비(총차3회)	1,224,800	1,741,000	516,200
용역비(3차1회)	300,000	816,200	516,200

- 잠원2빗물펌프장 신설공사 감리비 : 205백만원(`17년 205)

- 강남역 주변 역경사 관로 개선공사 감리비 : 311.2백만원(`16년18, `17년293.2)

○ 감리원 투입계획(총차)

[준공기한 연기]

○ 연기사유

- 본 공사 준공기한 연기 및 「강남역 주변 역경사 관로 개선공사」병행 시공에 따른 전면책임감리용역의 준공기한 연기

○ 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차(3회)	`13.04.01. ~ `16.12.31.	`13.04.01. ~ `17.07.31.	증)7개월
3차분(1회)	`15.11.20. ~ `16.12.31.	`15.11.20. ~ `17.07.31.	증)7개월

○ 귀책소재 : 도시기반시설본부(지체상금 해당없음)

□ 검토의견

○ 시설공사 준공기한 연기에 따른 건설사업관리기술자 추가 배치와 물가변동 조정금액 반영을 위한 설계변경 및 준공기한 연기가 필요함.

□ 조치계획

○ 상기 검토의견과 같이설계변경 및 준공기한 연장 사항을 승인 조치하고 재무과에 설계변경 및 준공기한 연장 계약 의뢰하고자 함.

붙임  1. 감리단 실정보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.  끝.