함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「뚝도정수센터 농축조공사 폐기물처리용역」 설계 변경(제 2회) 시행

1. 우리 본부에서 시행중인 『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 폐기물처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계 변경(제 2회)을 시행코자 합니다.

가. 용역 현황

1) 용 역 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 폐기물처리용역

2) 용역개요 : 뚝도정수센터 농축조공사로 발생되는 폐아스콘 및 폐콘크리트, 폐임목 등                           건설폐기물 수집·운반·처리

3) 공사기간 : 2016. 04. 11. ~ 2016. 12. 31.

4) 도급금액 : 237,699천원

5) 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비(시설비)

6) 계 약 자 : 목화산업㈜ 외 1개사

나. 변경 내용

1) 계약금액 변경

○ 변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
공급가액	216,090,000	236,190,000	증	20,100,000
부가가치세	21,609,000	23,619,000	증	2,010,000
도급금액	237,699,000	259,809,000	증	22,110,000

○ 변경 사유 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계) 폐기물 발생량 증가에                     따른 처리수량 변경 반영

2) 용역기한 연장

○ 용역연장 기한

- 당초 : 2016. 04. 11. ~ 2016. 12. 31.

- 변경 : 2016. 04. 11. ~ 2017. 06. 30.(증 181일)

○ 연장사유 귀책 소재 : 업체에 책임 없음

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 용역기한 연장 사유 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계) 공사기간                   연장에 따른 폐기물처리 용역기한 연장

붙 임 : 1. 용역기한 연장 및 계약금액 변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 합의서 1부. 끝.

주무관	신왕근		생산관리과장	한희선		생산부장	구자훈		경영관리부장	12/16 정진일
협조자	주무관	이경선		주무관	김성민		재무회계과장	박병식
시행	생산관리과-17461	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1317	/전송	02-3146-1319	/	swgking@seoul.go.kr	/	대시민공개