“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	교통운영과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기 알림

우리과에서 추진 중인「천호지하차도 철거·평면화 타당성조사 용역」과 관련하여 아래와 같이 용역 준공기한이 연기되었음을 알려드리니, 귀 과에서 추진 중인「천호대로 중앙버스전용차로 설치사업」설계 시행에 참고하시기 바랍니다.

가. 용역명 : 천호지하차도 철거·평면화 타당성조사 용역

나. 계약자 : 태조엔지니어링

다. 준공기한 변경내역

- (당초) 2016.12.30. → (변경) 2017. 3.31.

라. 연기사유

- 천호사거리 철거·평면화 타당성조사 대안 검토결과에 대해 주민의견 수렴기간 소요(’17.1월중 주민설명회 개최 예정).

끝.

	도로계획과장
전문관	윤갑진		광역도로계획팀장	최연호		도로계획과장	12/16 하종현
협조자
시행	도로계획과-18175	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 10층 도로계획과	/
전화	02-2133-8087	/전송	02-2133-0763	/	yunis777@seoul.go.kr	/	대시민공개