문서번호	생산관리과-17470
결재일자	2016.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
유양현		한희선	12/16 구자훈
협조
	주무관		유동수

폐기물 처리변경 실정보고

(자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비공사)

2016.  12.

상수도사업본부

(생산부)

폐기물 처리변경 실정보고

(자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비공사)

자양취수장 노후시설 정비공사 중 벤츄리유량계실 철거 및 기전시설 설치에 따른 도로굴착으로 폐기물량 증가함에 따라 실정보고 드림.

검토배경

Ⅰ

□ 실정보고(폐기물 처리 변경): 자양감 제16-153호(2016.12.15)

- 취수장 구내 전기공사(전선, 가로등) 및 기계공사(샘플링배관 등)공사를 위한 아스팔트 도로 굴착 물량 증가

- 취수장 구내 아스팔트 전면포장(덧씌우기)공사에 따른 폐아스콘 증가

- 구의정수센터 및 취수장 CA구내 도로 콘트리트 깨기물량 증량

- 취수펌프동 옥상 및 펌프실 콘트리트 깨기 물량 증가

사 업 개 요

ⅡⅠ

□ 용 역 명 : 자양취수장 활용을 위한 노후시설정비공사 폐기물처리 용역

□ 공사기간 : ‘16. 5. 16.~’16. 12.31

□ 용 역 비 : 8,225천원

□ 용 역 사 : 금강도시환경(주) 대표 이상훈

□ 주요내용: 시설용량 80만㎥(구의30, 뚝도50)

- 아스팔트 폐기물 : 168톤

- 콘크트리트 폐기물 : 79톤

- 혼합 폐기물 : 4톤

검토내용

Ⅲ

□ 검토결과

□ 취수장 벤츄리 유량계실 철거 2개소, 전기선로 부설, 기계배관공사에 따른 도로굴착이 증가되어, 아스팔트 폐기물이 증가 되었으며,

□ 아스팔트구간 하부의 콘트리트 포장층에 대한 추가 굴착으로 폐기물이 증가 및  취수펌프(10개소) 기초깨기 및 옥상층 무근 콘크리트 깨기에 따른 폐기물량이 증가 되었음

□ 공사비 증․감 : 증 7,862천원

구 분			당 초	변 경	증·감	비 고
	1. 순 공 사 비		7,444,273	15,340,000	증) 7,862,727
	2. 부가가치세		747,727	1,534,000	감) 786,273
	용역비 합 계		8,225,000	16,874,000	증) 8,649,000

조치내용

Ⅳ

□ 자양취수장 활용을 위한 노후시설정비공사의 각 분야별 공종에서 발생된 폐기물에 대하여 기존 도급업체로 하여금 긴급하게 처리토록 시행하고

□ 승인된 실정보고 사항은 향후 설계변경에 따른 사전 검토를 시행하여 반영하고 소요 공사비는 낙찰차액을 사용하고자 합니다.

따로붙임 : 감리단 검토의견서 1부. 끝.