투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약 의뢰(918공구 건설폐기물처리용역)

1. 도시철도토목부-15801(2016.12.16.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『지하철 9호선 3단게 918공구 건설폐기물처리용역』에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 건설폐기물처리용역

나. 계약금액 : 581,876천원(6차:30,000천원)

다. 용역기간 : 2010.08.27.~2016.12.31.(6차:2016.03.01.~2016.12.31.)

라. 처 리 자 : 삼환환경(주) 대표이사 강재성

마. 변경현황

구분	용역기간			용역금액(천원)
	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
6 차	2016.03.01. ~2016.12.31	2016.03.31. ~2017.12.31	증 12개월	30,000	30,000	-
총괄	2010.08.27. ~2016.12.31	2010.08.27. ~2018.12.31	증 24개월	581,876	581,876	-

바. 변경사유

- 6 차 : 공사구간 위치변경으로 인한 폐기물 발생시기 미 도래에 따라 6차 폐기물처리용역 준공기한 연기

- 총괄 : 국토교통부고시 제2016-713호 9호선 기본계획 변경 승인

[당초]2001년~2015년 ⇒ [변경]2001년~2018년

사. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업

도시철도9호선 3단계 건설, 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 관련공문 1부.

3. 변경내역서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	유원하		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	12/16 김진팔
협조자
시행	도시철도토목부-15828	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 9층(무교동)	/
전화	02-772-7222	/전송	02-772-7306	/	ryuoh@seoul.go.kr	/	대시민공개